문서번호	한양도성도감-10318
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장
박민상	신추교	11/10 심말숙

한양도성 오염 성돌 정비 실시설계 용역 계약 변경 계획

한양도성 오염 성돌 정비 실시설계 용역

계약 변경 계획

2014. 11

한양도성 오염 성돌 정비 실시설계 용역

계  약  변  경  계  획

한양도성 오염 성돌의 신중한 정비를 위해「한양도성 오염 성돌 정비 실시설계 용역」사업의 계약 기간을 연장하여 추진코자 함.

사업개요

❍ 용 역 명 : 한양도성 오염 성돌 정비 실시설계 용역

❍ 계 약 자 : ㈜볕터건축사사무소 대표 황진하

❍ 계약금액 : 14,896,000원(일금일천사백팔십구만육천원정)

❍ 계약기간 : 2014. 10. 2 ~ 2014. 11. 10

변경내용

구분	당초	변경	비고
계약금액	14,896천원	좌 동	변경없음
계약기간	2014. 10. 2 ～ 2014. 11. 10	2014. 10. 2 ～ 2015. 11. 30	20일 연장

❍ 변경사유

- 오염 성돌 정비를 위한 관계 전문가 자문 의견에 따라, 기존 낙서 제거 부분의 이질감 개선 대책 마련을 위한 추가 기간 소요로 용역기간 연장

향후일정

❍ ’14. 12월  : 용역 준공

❍ ‘15.  1월  : 한양도성자문회의 전문가 자문

❍ ’15.  3월 ~ : 사업 시행. 끝.