문서번호	방재시설부-11496
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	11/11 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

추진기지 그라우팅보강 검토보고

2014. 11

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

추진기지 그라우팅보강 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설공사에 따른 토출관로 추진기지 보강방안에 대한  서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토보고임.

추진근거

❍ 2014.10.17.(금) 설계설명회 및 가시설 및 추진기지 보강에 따른 자문회의

결과보고 및 업무지시(방재시설부-10517, 2014.10.20.)

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,541백만원

실정보고 내용

❍ 공릉2빗물펌프장 추진기지 발진구 토류판 제거시 토사유입에 의한 원지반 지표면부의 국부적 함몰 또는 침하 등이 예상되므로 발진구 선단부 그라우팅 보강필요

❍ 현재 발진기지 굴착완료된 상태로 원지반 상부에서의 그라우팅은 옹벽등이 위치하고 있어 곤란한 실정으로 굴착면에서 추진방향 전면부에 대한 수평그라우팅이 필요

❍ 그라우팅 배합은 추진력을 고려하여 적용하며 적용범위는 파괴각을 고려하여 보강길이 3.0m, 보강면적 관경+여유폭 0.5m 시행을 원칙으로 하며 필요시 현장여건에 따라 조정

- 추진개요 : 강관 ø1,500㎜@2열, L=22m

- 추진대상지층 : 느슨한 모래층

감리검토내용

❍ 상기와 같이 토출관로 지층이 사질토로 발진구 토류판 제거시 토사유입에 의한 원지반 지표면부의 국부적 함몰 또는 침하등이 예상되므로 발진구 선단부 그라우팅 보강이 필요하다고 사료됨

- 그라우팅 보강 개략공사비 : 7,120천원

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 설계사(도하) 검토의견 및 계산서 1부.

3. 공사비 산출서 1부. 끝.