문서번호	공공개발센터-9210
결재일자	2014.11.11.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	개발정책팀장	공공개발센터장	도시관리정책관		도시계획국장
김영일	이상면	이성창	류훈		11/11 이제원
협 조
	주무관			서주옥

노들섬 활용방안 마련을 위한

설계공모 추진계획

2014. 11

도시계획국

(공공개발센터)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	자문위원 등	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

노들섬 활용방안 마련을 위한

설계공모 추진계획

한강과 어루러지는 노들섬 명소화 조성을 위한 창의적이고 수준높은 대안 발굴을 위해 설계공모를 추진하고자 함

**********************************************

Ⅰ		추진배경

○ 그간 ‘노들섬 포럼’과 사회적 공감대 형성을 위한 참여프로그램(시민아이디공모, 학생디자인스쿨, 전문가 스케치 등) 진행을 통한 논의 및 공론화 체계 마련

○ 이에 그간의 제시된 활용방안을 바탕으로 시민의 장소, 새로운 미래가치를 구현하는 공간으로 재탄생하기 위한 창의적인 설계안 마련이 필요하여  설계공모 추진

Ⅱ		추진현황

□ 대상지 현황

○ 위 치 : 용산구 이촌동 302-6, 146일대(노들섬 및 주변지역)

○ 면 적 : 약 119,924㎡

- 섬 상단면적 : 60,818㎡ (서측 : 26,631㎡, 동측 : 27,014㎡)

(대지 : 53,665㎡, 도로 : 7,153㎡)

- 하천부지 면적 : 59,106㎡

○ 현 황 : 서측은 도시농업공원으로 이용, 동측은 헬기장 및 삼림 위치

□ 추진경위

○ '13. 8 ~'14.11: 노들섬 포럼 구성·운영(6회)

- 포럼 운영위원회(4회), 포럼 소위원회 개최(5회)

○ '13.12.20 : 시민공개토론회 개최, 홈페이지(e-노들섬) 구축․오픈

○ '14. 1 ~ 12 : 테마별 사진공모전 실시('14. 1월/3월/8월/10월)

- 연중 4회 테마별 실시(총 1,164작품 접수)

○ '14. 4.11 : 노들섬 시민참여 프로그램 기획 및 운영방안 용역

- 사진공모전, 학생디자인캠프, 전문가 아이디어 스케치 등 진행

○ '14. 10.13 : 활용방안 마련을 위한 기술용역 착수

	【노들섬 활용방안 타당성조사 및 기본계획 수립 용역】
□용역기간 : ′14. 10. ~ ′15. 8. □용역기관 : ㈜해안건축, 서울연구원 (용역금액 : 320백만원)

Ⅲ		추진계획

: 세부사항 별도방침

□ 기본방향

○ 내실 있는 설계공모를 위해 전문위원(PA)과 세계적으로 명망있는 심사위원 선정

○ 이를 위해 전문위원 및 심사위원 추천과 공모전반을 자문하는『운영위원회』구성, 운영하고

○ 별도의『전문기관』에 위탁시행을 통해 홍보, 심사, 전시 등 설계경기 운영에 필요한 제반업무 수행

□ 설계경기 관리용역 추진 계획

○ 용 역 명 : 노들섬 활용방안 설계공모 관리용역

○ 기간/금액 : **************************

○ 과업내용 : 기획, 홍보, 진행, 관리 등 설계경기 운영에 필요한 제반업무 수행

- 기획 : 설계경기 운영에 대한 전반적인 사항과 공모방향 수립 및 관련업무 지원

- 홍보 : 홍보물 제작과 발송, 홈페이지 구축과 운영 및 광고등 다양한 홍보 시행

- 심사 : 심사장소 선정, 심사위원 초청 및 의전 등 원활한 심사를 위한 심사지원

- 기타 : 작품 전시회 개최, 작품집 제작, 향후 당선자 계약체결 관련 지원 등

Ⅳ		향후일정

○ 설계경기 관리용역 계약               : ’15.  2.

○ 설계공모 공고                        : ’15.  5.

○ 설계공모 확정(시상)                  : ’15. 10.  끝.