문서번호	정수시설과-3378
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	정수시설과장	소장
이우봉	남효돈	11/11 유성종

설계변경 심의 결과보고

(2014암사정수센터 기계설비보수공사(연간단가)

2014. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의 결과보고

(2014암사정수센터 기계설비 보수공사(연간단가)

“22014암사정쑤센터 기계설비보수공사(연간단가)” 시행 중 시공 물량 증․감 사항에  대하여 설계변경 심의를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014암사정수센터 기계설비 보수공사(연간단가)

○ 계약업체 : ㈜광장이엠씨 (대표이사 황 갑 주)

○ 계약금액 :  금259,262,950원

○ 공사기간 : 2014.5.16.∼22014.12.31

□ 설계변경 사유

○ 응집기 및 슬러지콜렉터 등 수리 물량 증가 및 보험료 정산에 따른 설계변경

○ 응집지 및 침전지 정수설비 상태는 물 배수 후에 확인 및 수리 가능하며,

고장 물량이 예상보다 증가 하였 음(지 청소시 즉시 수리조치)

□ 심의내용

◦설계변경의 타당성

◦신규공종 단가 산출 및 시공물량 변동 적정여부

○ 공종 일위대가 산출

◦계약 변동(증∙감)물량 계약단가 낙착률 적용범위(±3％)내 적용 적정 여부

◦제경비 적정 산정 및 적용 적정성

◦각종 제반규정 준수 여부

○ 설계변경 내역

공 종	도 급 액		증 ․ 감	주요변경사유
	당 초	변 경
도 급 액	259,262,950	284,374,380	(증)25,111,430
펌프,응집제투입설비, 부유물제거기 등	108,837,938	14,460,000	(감)94,377,938	시공물량 정산
슬러지콜렉터, 와이어로프 수리 등	16,811,616	66,983,694	(증)50,172,078	시공물량 정산
응집기 수리	34,912,000	98,367,015	(증)63,455,015	시공물량 정산
기타 수리 물량	8,003,070	13,361,985	(증)5,358,915	시공물량 정산
경비 등 기타	90,698,326	91,201,686	(증)503,360	보험료 등 정산

□ 심의결과

○ 설계변경의 타당성 : 타당함

○ 계약변동(증․감)물량 계약단가 적정 적용여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 조치의견

○ 심의 결과에 의거 설계변경 시행코자 합니다.

붙임 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 심의의견서 1부.   끝.