문서번호	기전설비2과-4598
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장
김재성	신용철	11/11 차광재

2014년 뚝섬 음악분수 외 4개소 유지보수용역(연간단가) 설계변경(정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

기전설비2과

2014년 뚝섬 음악분수 외 4개소

유지보수용역(연간단가) 설계변경(정산) 보고

2014년 뚝섬 음악분수 외 4개소 유지보수용역(연간단가) 시행중 실정보고에 의해 설계변경 사항이 발생 하였기에 설계변경(정산) 조치코자 보고드림

□ 용역목적

뚝섬한강공원 내 분수시설물을 유지보수업체에 위탁하여 효율적, 체계적인 유지관리

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2014년 뚝섬 음악분수 외 4개소 유지보수용역 (연간단가)

❍ 용역기간 : 2014. 03. 31 ~ 2014. 12. 31

❍ 도 급 자 : 레인보우스케이프(주) 대표 정 운 익

❍ 계약금액 : 98,900천원

❍ 용역대상 : 5개소(음악분수, 벽천분수, 물보라극장, 자연학습장분수, 금호나들목벽천분수)

❍ 보수점검 : 27회(정기 10회, 수시 17회)

- 정기점검 : 봄 월 1회, 가을 월 1회

- 수시점검 : 분수시설물 이상작동 오류 등 필요시 마다

□ 변경 내용

○ 변경사유 : 연간단가 실물량에 따른 정산 및 신규 추가사항 발생에 따른 변경

○ 분수별 주요 변경내용

- 용역비 증감내역

구분	변경내역			비고
	당초	변경	증․감
순공사비	81,672,079	96,712,988	증)15,040,909
제 경 비	8,237,013	9,377,922	증) 1,140,909
공급가액	89,909,091	106,090,910	증)16,181,819
부가가치세	8,990,909	10,609,090	증) 1,618,181
총용역비	98,900,000	116,700,000	증)17,800,000	증17,800,000

- 실물량 정산

구분	물량정산			비 고
	계약물량	실물량	증․감
1. 음악분수
신규곡 입력	11곡	10곡	감)1곡
수중모터펌프교체, 40hp	1set	-	감)1set
수중모터펌프교체, 7.5hp	1set	-	감)1set
수중모터펌프교체, 5.5hp	1set	-	감)1set
분수용조명등교체, RFL1500	5set	8set	증)3set
분수용조명등교체, RFL900	17set	40set	증)23set
솔레노이드밸브코일교체, 25A	16개소	5개소	감)11개소
마스터콘트롤러교체	2set	1set	감)1set
컨트롤조인트박스보드교체, RSJB101용	3set	7set	증)4set
분수이용안내문화면교체	3회	1회	감)2회
소계	60	72	증)12
2. 물보라극장
시설시스템긴급점검	1회	-	감)1회
소계	1	-	감)1
3. 벽천분수				증․감 없음
4. 자연학습장분수				증․감 없음
5. 금호나들목 벽천분수				증․감 없음

- 신규 추가사항

구분	물량	용역비 (순공사비/천원)	비고
1. 음악분수
수중모터 교체, 25HP	1대	4,972
콘트롤러조인트박스 교체, RSJB101	3set	5,015
소계		9,987
2. 물보라극장
LAMP 교체	1식	7,012
프로젝터 크리닉	1식	2,337
콤푸레셔 수리	1식	1,832
제습기 신설	1식	607
에어콘 교체	1식	1,729
영상투과 유리교체	1식	654
소계		14,171
총용역비		24,158

- 신규단가 : 협의율(낙찰율 94%) 적용

□ 조치의견

❍ 본 건은 뚝섬한강공원 내 분수시설물을 효율적․체계적으로 유지관리하기 위해 연간단가 용역으로 시행 중인 「뚝섬 음악분수 외 4개소 유지보수용역(연간단가)」에 대해 실제 점검․보수한 내용에 따라 물량정산하고, 신규 추가사항에 대해 반영코자 변경하는 건으로 상기 보고한 내용과 같이 설계변경(정산) 시행코자 함

첨부 : 2014년 뚝섬 음악분수 외 4개소 유지보수용역(연간단가) 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.