투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	서울시 용산구 두텁바위로5길 27, 204호(갈월동, 남산하컴빌)
(경유)
제 목	뚝섬눈썰매장 사용·수익허가기간 변경요청관련 승인 통보

1. 공원기획과-3860(2014.11.4.)호 및 한성레포츠 허가기간조정 요청공문(2014.11.10.)과 관련입니다.

2. 수허가업체로부터 한강공원 뚝섬눈썰매장 사용·수익 허가기간 변경요청(사용준비기간 내 시설물 설치곤란 및 제설기간 촉박으로 정상개장 곤란, 시설물의 안전설치 등)이 있어, 다음과 같이 사용․수익허가기간을 변경승인하오니 뚝섬눈썰매장 운영일정에 차질이 없도록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

[사용․수익허가기간 변경승인 사항]

가. 대상 : 뚝섬눈썰매장 사용·수익허가

나. 허가기간 변경

구 분	사용․수익 허가기간	운영기간
당 초	’14.12.02 ~ ’15.02.28. (89일)	’14.12.18 ~ ’15.02.15. (60일)
변 경	’14.11.15. ~ ’15.02.28. (106일)	’14.12.18 ~ ’15.02.15. (60일)

다. 허가기간 연장기간 중 점용면적 : 1,840㎡ (슬로프 설치 및 작업공간)

라. 허가기간 연장에 따른 사용료 부과 : 3,722,320원(부가세 별도)

구 분	허가면적	낙찰가 (부가세 별도)	사용료/ 1일·1㎡당	연장기간중 점용면적	허가기간 연장	추가 사용료 (부가세 별도)
뚝 섬	10,600㎡	112,000,000원	119원	1,840㎡	17일	3,722,320원

마. 납부기한 : 2014. 11. 13.(목).까지

바. 운영업체 : 한성레포츠 김구현

사. 허가기간 변경(연장)관련 지급이행보증보험, 화재보험, 배상책임보험 기간을 변경하여 증서 제출바랍니다.

붙임 : 납부고지서 1부.(별도첨부) 끝.

	서울특별시한강사업본부장
★주무관	권도석		공원기획과장	박노원		공원부장	11/11 차광재
협조자	주무관	이상훈
시행	공원기획과-3907	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0767	/전송	02-3780-0740	/	kkddss36@seoul.go.kr	/	대시민공개