문서번호	급수운영과-24238
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장
이경희	11/11 장시명

정산시행 보고(제2차 기성)

『2014년 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)』

2014.11.

남부수도사업소

(급수운영과)

『2014년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)』수급인으로 부터 2차 기성(정산) 신청이 있어 아래와 같이 기성(정산) 시행하고자 합니다.

2014. 11. 10.

보고자 : 지방시설주사   이 경 희

남부수도사업소장  귀하

□ 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)

나. 공사기간 : 2014. 06. 02. ~ 2015. 6. 30

다. 시공업체 : (주)영길토건   대표 남궁영희

□ 금회 정산(제1차)

가. 정산기간 : 2014. 08. 03. ~ 2014. 10. 06.

지시번호	지시일	완료기한	완료일
330 ~ 799	2014.08.03	2014.10.06	2014.10.06

나. 공사위치 : 신대방동 349-3번지 외 470개소

다. 정산면적                                                                                                                                 (단위:a)

계	ASP-표층	ASP-2	ASP-1	CA-2
48.03	29.20	15.38	3.14	0.31

라. 기성(정산)금액(단위:원)

총 계약금액	전회까지 누계 기성금액	금회 기성금액	기성 누계금액	기 성 잔 액
1,341,281,000	80,047,000	205,634,000	285,681,000	1,055,600,000

□ 조치 의견

- 포장복구 물량 및 물량산출서와 현장확인 결과 이상없음.

- 첨부 내역과 같이 기성(정산) 처리코자 합니다.

첨부 : 정산(기성) 내역서(물량표) 1부. 끝.