문서번호	설비부-12592
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	시책사업과장
김원태	11/11 이흥복

『동부간선도로 확장(3공구) 전기공사(E/S 7회)』

설계변경 소위원회 심의요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

서울특별시도시기반시설본부

(설비부)

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호	설비부 -	요청부서	시책사업과	요청일	2014. 11. 11.
공 사 명	동부간선도로 확장(3공구) 전기공사
감리개요	공사규모	- 동부간선(상계교~의정부시계) 2.25km구간 가로등 - 지하차도 수․배전 및 동력설비 1식
	공사기간	2008. 06. 26 ～ 2015. 12. 31
	감 리 사	동부엔지니어링(주)
	설 계 사	㈜동일기술공사
	시 공 사	㈜정등전력 대표 김병갑
심의요청 사 유	∘ 3,000만원 이상 설계변경(증액)
<설계변경 사유> ○ 물가변동에 의한 계약금액 조정
주 요 변 경 내 용
○ 제7회 물가변동에 의한 계약금액조정 : 증46,239,000원
별첨서류	1. 설계변경 심의 자료 1부(별첨).

건 명 : 동부간선도로확장(3공구) 전기공사(E/S 제7회)

■ 현 황

계약명	동부간선도로 확장(3공구) 전기공사		시 공 자	㈜정등전력
공 사 규 모	○ 동부간선도로 2.25km구간 가로등 ○ 지하차도(상도,장암) 전기설비	계 약 금 액	1.607,456천원			최초 계약일
						2008.06.26
공사기간	2008.06.26 ~ 2015.12.31	감리자	동부엔지니어링(주)		설계자	㈜동일기술
계약형태	기타( ● ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사( )				※ 작성자 : 김원태 ☎ 3708-8648

■ 설계변경 개요

구분	공 종	설계변경개요	조정(변경)금액	관련근거	비고
전기공사	물가변동으로인한 계약금액조정(제7회)	○ 물가변동 조정율 • 4.02% ○ 물가변동 경과기간 • 1,067일 ○ 변동적용 제외금액 • 457,214,600원 ○ 물가변동 적용대가 • 1,150,241,400원	(증)46,239,000원	지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법 ∙법률 제22조 ∙시행령 제73조 ∙시행규칙 제72조
도 급 비		당 초	1,607,456,000원
		변 경	1,653,695,000원

■ 설계변경 배경

○ 물가변동조정 요건충족.

- 물가변동 경과기간 : 90일 이상

- 물가변동 조 정 율 : 3% 이상

■ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	⑪
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 46,239천원 ② 감액 : 원 ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	⑦,⑧

※  해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경 경위

○ 설계변경(물가변동) 승인내용

- 감리단 물가변동(제7회)관련 계약금액 조정보고 【○】

- 설계변경(물가변동) 심의요청 【○】

○ 설계변경 승인절차

- 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정심의) ➞ 설계변경 ➞ 변경계약 ➞ 공사시행