문서번호	시설보수과-4681
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
금종융		김찬구	11/12 민승기
협조

도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사 설계변경(정산) 보고

2014. 11.

남부도로사업소

(시설보수과)

도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사 설계변경(정산) 보고

우리 사업소에서 금년 시행중인 “도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사”의 현장에 대하여 시설관리공단에서 기보고한 현장조사 및 방침에 의거 실시공 물량으로 정산 처리하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사

○ 공사기간 : 2014.5.22 ~ 2014.11.17

○ 총공사비 : 1,139,954,300원

- 도급비 915,644,300원, 관급비 134,479,240원, 이전비 89,830,760원

○ 공사개요 : 교면포장 96a, 신축이음장치보수 155m, 표면보수 468㎡ 등

○ 도 급 자 : 연단토건(주) 대표  이 정 수

○ 감 독 자 : 서울시 시설관리공단(공사감독1처 성경석)

설계변경 사유

가. 변경사유 : 현장 실정보고 및 발주청 작업지시, 실물량 정산에 따른 물량 증,감 등에 따른 변경

나. 변경내용

○ 봉천천복개 구스(매스틱)아스콘포장 시행 등 신규공종 발생

- 구스(매스틱)아스콘포장(야간) 당초 미반영 → 변경면적(A)=1,079㎡

- 유공관 설치(야간) 당초 미반영 → 변경연장(L)=95m

- 성형줄눈공(야간) 당초 미반영 → 변경연장(L)=110m

- 소요공사비 : 증) 133,320천원

○ 도림천4복개 및 봉천천복개 신축이음장치 교체

- 도림천4복개 : 당초 미반영 → 변경연장(L)=26.3m (증 26.3m)

- 봉천천복개 : 당초 연장(L)=155.2m → 변경연장(L)=207.8m (증 52.6m)

- 소요공사비 : 증) 88,110천원

○ 도림천4복개 재료분리 등 열화면 증가로 인한 상판보수 물량 증가

- 당초면적(A)=50㎡ → 변경면적(A)=75㎡ (증 25㎡)

- 소요공사비 : 증) 6,490천원

○ 도림천4복개 및 봉천천복개 차선도색 공종 추가

- 당초 미반영 → 변경연장(L)=4,913m (증 4,913m)

- 소요공사비 : 증) 25,300천원

○ 도림천4복개 교면방수[고탄성아크릴(MMA공법)] 작업방법 변경

(야간→주간+야간)

- 당초 야간작업 면적(A)=4,569㎡ → 변경 야간작업 면적(A)=1,709㎡

+ 주간작업 면적(A)=2,787㎡

- 소요공사비 : 감) 42,240천원

○ 기타 수량 증 ․ 감 사항

- 하도급대금보증서 발급수수료 및 건설기계대여대금지급보증서발급비용 제외, 산업안전보건관리비 및 환경보전비 실정산 등

- 기타 시공물량 실측에 따른 물량정산 등

○ 설계변경 심의결과 반영

- 관련근거 : 공사감독1처-11588호 (2014.11.10)

· 산업안전보건관리비 사용내역 중 신축이음장치 교체작업시 건설기계 유도신호수 제외

· 차선도색 공종 중 보통인부(교통통제) 중복 제외

· 차선도색 산식표기 오류 수정 : ÷ 공용 50% → ×50%

· 차선도색 세부 수량산출서 작성

· 교통정리원 단가적용 : 노무비 → 경비 조정(반복적인 감사지적 사례)

다. 주요 공종 수량 변경(증,감)

공 종	규 격	단위	수 량		증,감	비고
			당초	변경
<도림천4복개>
절삭후 아스콘 덧씌우기	일시공량 10a이하,야간	a	87.00	57.87	-29.13
절삭후 아스콘 덧씌우기	일시공량 15a이하,주간	a	-	27.87	27.87

공 종	규 격	단위	수 량		증,감	비고
			당초	변경
교면방수	BAS복합공법,야간	㎡	4,151	4,078	-73
교면방수	고탄성아크릴,야간	㎡	4,569	1,709	-2,860
교면방수	고탄성아크릴,주간	㎡	-	2,787	2,787
<봉천천복개>
절삭후 아스콘 덧씌우기	일시공량 5a이하,야간	a	9.00	9.12	0.12
절삭후 아스콘 덧씌우기	일시공량 10a이하,야간	a	-	10.79	10.79
교면방수	고탄성아크릴,야간	㎡	908	912	4
구스(매스틱)아스콘포장	교면포장 T=4cm,야간	㎡	-	1,079	1,079

라. 공사비 변경사항(증,감)

구 분		당 초	변 경	증, 감
총공사비		1,139,954,300	1,283,082,000	증 143,127,700
도급비	공급가액	832,403,909	993,000,000	증 160,596,091
	부가가치세	83,240,391	99,300,000	증 16,059,609
	합계	915,644,300	1,092,300,000	증 176,655,700
관급자재비		134,479,240	111,044,370	감 23,434,870
이 전 비		89,830,760	79,737,630	감 10,093,130

향후 계획

○ 상기내용 관련 공사진행중 현장 실정보고 내용 및 실시공 물량 증,감  정산 등에 따른 설계변경 내용으로 공단 제출내용에 의거 재계약 의뢰(시 재무과)

첨부  1) 설계변경(정산)도서 1부.

2) 설계변경보고서 1부.

3) 안전관리비, 환경보전비 1부 (용량과다로 미첨부)

4) 제비율검증표 1부.   끝.