함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(길동사거리~생태공원앞 간 송배수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『길동사거리~생태공원앞 간 송배수관 정비공사』와 관련하여 설계변경 심의결과에 의거 아래와 같이 변경계약 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 길동사거리~생태공원앞 간 송배수관 정비공사

나. 공사개요 : 당초 D=150~400㎜, L= 1,335m

변경 D=150~400㎜, L= 1,384m(증 49m)

다. 공사기간 : 2014. 5. 29. ~ 2014. 11. 17.

라. 계약상대자 : 태양토건㈜ 대표 맹준호

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 송배수관 정비-21102)

바. 설계변경 사유

- 신규공종 및 계약물량 증•감

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
도 급 비	438,573,760	414,029,000	(감) 24,544,760
공급가액	398,703,418	376,390,000	(감) 22,313,418
부가가치세	39,870,342	37,639,000	(감) 2,231,342

붙  임 : 1. 내부품의서 및 설계변경 관련도서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김주경		주무관	송종범		시설관리과장	전결 11/12 代송종범
협조자
시행	시설관리과-17785	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울시 강동구 성내로51(성내동 541-4)	/
전화	3146-5193	/전송	3146-5239	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개