문서번호	조경과-15249
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
조현		한정훈	11/12 이원영
협조

『녹지활용계약 쉼터 조성사업(강동구 천호동성당)』

사업비 추가배정 요청 관련 검토보고

2014. 11.

푸른도시국

조 경 과

『녹지활용계약 쉼터 조성사업(강동구 천호동성당)』

사업비 추가배정 요청 관련 검토보고

강동구 천호동 「녹지활용계약 쉼터 조성사업」과 관련 설계변경으로 인한 사업비 추가배정 요청이 있어 검토하고 아래와 같이 조치코자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 천호동성당 로즈메리힐 산책로 보완사업

○ 위    치 : 강동구 구천면로 236-1(천호동)

○ 규    모 : 400㎡(L=150m, W=2~4m)

○ 사 업 비 : 150,000천원

○ 사업내용 : 산책로 데크 및 경사로 난간 등 편의시설 설치

□ 변경개요

○ 위   치 : 천호동성당 로즈메리힐 진입부

○ 변경내용 : 데크 포장 83.73㎡, 난간 설치 76m, 장미 식재 450주

○ 증액금액 : 35,635천원

○ 요청사항 : 증액금액 중 부족예산 추가 재배정

- 기배정액 : 18,874천원(낙찰차액 10,635천원, 집행잔액 8,239백만원)

- 부족예산 : 16,761천원

□ 검토결과

○ 설계변경으로 추가되는 부지는 금년 사업부지와 연결되는 진입부 경사로로 포장정비 및 안전시설 설치 등의 시설보완이 필요함.

○ 증액되는 금액 중 부족예산은 우리시 유보금(16,761천원)을 추가 재배정

□ 처리의견

◦ 위 검토결과에 따라 강동구 부족예산은 추가 재배정하고 2014년 11월중 사업이 완료될 수 있도록 통보하고자 합니다.

붙 임 1. 관련 공문 1부.

2. 현황사진 1부.

3. 추가 사업계획 물량 1부.  끝.