문서번호	시설보수과-4294
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김호규		박용선	11/12 송상영
협 조

도로시설물 세척용역 설계변경 검토보고

2014. 11.

동부도로사업소

(시설보수과)

도로시설물 세척용역 설계변경 검토보고

도로시설물 세척용역 예산잔액 활용과 관련 겨울철 강설로 오염된 시설물에 대한 추가 세척으로 당초 계약물량이 증가되어 설계변경을 검토하는 사항임

※ 관련근거 : 도로시설물 세척용역 예산잔액 활용계획 보고

[시설보수과-4279(2014.11.11.)]

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 2014년 도로시설물 세척용역

용역기간 : 2014. 03. 31. ~ 2015. 02. 28.

도 급 액 : 140,801,000원

용역개요 : 지하차도 2개소, 터널 2개소 세척

도 급 자 : 삼심아이앤씨 대표 김민건

Ⅱ		설계변경 현황

용역비 변경현황

구 분	당 초	변 경	증.감	비고
총용역비	140,801,000원	160,710,000원	증)19,909,000원

세척물량 변경현황

공 종	단 위	수량		증.감	비고
		당 초	변 경
터널 세척	㎡	145,370	155,783	증)10,413	5→7회
지하차도 세척	㎡	37,240	35,272	감)1,968	천호․석촌지하차도 세척횟수 변경

Ⅲ		변경사유

겨울철(12,1,2월) 강설로 인해 매연과 먼지로 오염된 도로시설물의 추가  세척 및 천호․석촌지하차도 세척횟수 변경으로 당초 계약물량의 증․감에  따른 설계변경 사항임.

Ⅳ		조치의견

세척물량 증․감에 따른 변경사항으로 위와 같이 설계변경을 시행하여 도로

시설물 세척용역 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 도로시설물 세척용역 예산잔액 활용계획 보고 1부.

2. 세척용역 설계변경내역서 1부.  끝.