투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사주변 차폐목 식재공사 설계변경(정산)시행

1. 관리단속과에서 시행중인 “청사주변 차폐목 식재공사”에 대한 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 청사주변 차폐목 식재공사

나. 공사기간 : 2014. 11. 6. ~ 2014. 11. 20.

다. 도 급 자 : 수국조경개발(주)   대표 장승연

라. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		8,180,000	8,036,000	감)	144,000
도급비	공급가액	7,436,364	7,305,455	감)	130,909
	부가세	743,636	730,545	감)	13,091
	소계	8,180,000	8,036,000	감)	144,000

마. 예산과목

- 도로관리, 사업소환경개선, 도로사업소환경개선, 시설비

바. 설계변경 사유

- 산업안전보건관리비 적용 제외 공사로 감액 변경

붙임 : 1. 설계변경 내역서   1부.

2. 합의각서         1부.  끝.

★주무관							홍용현				주무관					계기남					관리단속과장					11/12 김영선
협조자				주무관							이경남
시행			관리단속과-14669										(						)		접수												(						)
우	121-270					서울 마포구 가양대로 203																/			http://www.seoul.go.kr
전화		300-8313							/전송			300-8337					/	bluemoon5922@seoul.go.kr													/	대시민공개