문서번호	총무과-16246
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	총무과장
홍해연	최호철	11/12 이경로
협 조

2014년 음식물쓰레기 처리용역 설계변경

2014.  11.

서

서울대공원

(총무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 음식물쓰레기 처리용역 설계변경

대공원내 직원식당(관리부, 동물원), 돌고래쇼장, 자연캠프장에서 배출되는 음식물쓰레기 처리물량(용역)을 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 함.

□ 용역 개요

○ 계 약 명 : 2014년 음식물쓰레기 처리용역

○ 계약업체 : 바우네농장 대표 : 최민영

○ 계약금액 : 총17,400,000원 (단가119*146,218ℓ)

○ 계약기간 : 2014.1.1.~2014.12.31.(12개월)

○ 예산과목 : 서울대공원 총무과/공원 이용시민 만족도 향상/공원관리 시민참여확대와이용활성화/시민만족도향상/공원시설관리용역/공공운영비(201-02).

□ 설계변경 내용

(단위:ℓ)

구 분	변 경 내 역		증·감	비 고
	변경 전	변경 후
계	146,210	169,210	증23,000 (증2,737,000원)
연초 예상량	146,210	146,210		10월 누계 146,210ℓ
추가 발생 예상량	-	23,000	증23,000	11월~12월 예상량

□ 설계변경금액 : 금20,137,000원(증2,737,000원)

□ 설계변경 사유

○ 공원내 직원식당 및 돌고래쇼장에서의 음식물 가공전 처리 물량 증가로 음식물 쓰레기량이 증가와 자연캠프장 입장객의 증가로 쓰레기량이 증가하여 설계변경을 하고자 합니다.

붙임  2014년도 월별 음식물쓰레기 발생내역 및 예상내역1부. 끝.