문서번호	도로보수과-5022
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	성동도로사업소장
홍수종	국중진	11/12 정진오

【2014년 불량맨홀정비공사(연간단가)】 설계변경(2회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

성동도로사업소

(도로보수과)

·

설계변경 검토보고(제2회)

『2014년 관내포장도로불량맨홀정비공사(연간단가)』시행 중 정비대상 물량 증가로 인한 하반기 추가예산 배정 및 집행잔액 사용계획과 기존 신기술 공법(SMT공법)을 개선하여 개선된 공법으로 변경시공, 일부공종 누락에 따른 신규공종 발생에 대하여 설계변경사항을 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 공사개요

〇 공 사 명 : 2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

〇 공사개요 : 불량맨홀정비 558개소

〇 공사기간 : 2014. 4. 1 ~ 2014. 2. 28

〇 계약금액 : 519,924,000원

〇 계약업체 : 삼서건설(주) 대표 나남열

□ 변경사유

〇 2014년 하반기 불량맨홀 정비예산 재배정(50,000천원) 및 집행잔액(낙찰차액81,000천원)

사용계획 보고에 의거 추가 예산 공사비 반영 추진(도로보수과-4346호, 2014.9.29)

〇 기존 신기술공법(SMT공법)의 시공방법을 개선하여 개선된 공법으로 변경        시공에 따른 신규공종 발생

- 개선된 공법으로 시범시공(30개소)(도로보수과-4336호, 2014.9.26,)

- 개선된 공법으로 잔여물량(7차 작업지시 이후) 시공에 따른 단가 조정

(도로보수과-4835호, 2014.10.30.)

〇 당초 계약된 인상 높이(0~25㎝) 중 일부 누락된 인상 높이(0~9㎝,야간) 신규공종 발생

〇 평탄성 확보를 위한 추가커팅(5~30㎝) 공종 중 일부 누락된 신규공종 발생

〇 공종별 수량 조정

□ 설계변경 내역

〇 신규공종(개선된 공법 시범시공 30개소) : 개선된 공법(가칭,SMS공법) 품셈에        의거 산출후 일위 대가표에 낙찰율(88.902%) 적용

공 종	규 격	단위	수 량	비고
계			30
하수도	Ø648, 인상높이 0~7㎝	개소	16
상수도	Ø648, 인상높이 0~4㎝	개소	2
통 신	Ø766, 인상높이 0~10㎝	개소	9
	Ø918, 인상높이 2~5㎝	개소	3

공 종	규 격	단위	수 량	비고
계			249
하수도	Ø648, 인상높이 0~10㎝	개소	64
상수도	Ø648, 인상높이 0~10㎝	개소	64
통 신	Ø766, 인상높이 0~10㎝	개소	48
	Ø918, 인상높이 0~10㎝	개소	43
	Ø1108, 인상높이 0~5㎝	개소	4
	□1080×580, 인상높이 0~10㎝	개소	14
특수소형	Ø250, 인상높이 5㎝	개소	12

〇 신규공종(잔여물량 개선된 공법 시공 249개소) : 개선된 공법(가칭,SMS공법)            품셈에 의거 산출후 일위대가표에 협의단가(94.451%) 적용

〇 일부 누락된 신규공종 : 품셈에 의거 산출후 낙찰율 적용

공 종	규 격	단위	수 량	비고
계			25
하수도(Ø648)	인상높이(0~5㎝),추가커팅(5~15㎝)	개소	8
	평탄성 확보를 위한 추가커팅(5~10㎝) 표층	개소	2
통신,전기(Ø766)	인상높이(0~12㎝),추가커팅(5~15㎝)	개소	7
	평탄성 확보를 위한 추가커팅(5~10㎝) 표층	개소	1
통신,전기(Ø918)	인상높이(0~9㎝),추가커팅(5~15㎝)	개소	7
	평탄성 확보를 위한 추가커팅(5~10㎝) 표층	개소	1

공 종	규 격	단위	수 량		증·감	비고
			당 초	변 경
계			558	743	증)185
하수도	Ø648	개소	96	161	증)65
상수도	Ø648	개소	132	225	증)93
하수, 통신 등	Ø766	개소	148	179	증)31
통신, 전기 등	Ø918	개소	88	114	증)26
통신, 전기 등	Ø1108	개소	47	6	감)41
통신, 전기	□1080×580	개소	26	21	감)5
특수소형	Ø250	개소	21	37	증)16

〇 공종별 물량변경

〇 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총공사비	519,924,000	635,000,000	증)115,076,000
도 급 비	519,924,000	635,000,000	증)115,076,000
이 설 비	-	-	-

□ 예산과목

〇 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,(도시개발), 노후포장도로정비공사,         시설비

□ 조치의견

〇 상기 보고내용과 같이 하반기 추가예산, 집행잔액(낙찰액), 신규공종(개선된 공법),        공종별 수량조정에 대하여 설게변경을 시행하여 불량맨홀정비에 만전을          기하고자 합니다.

붙임 1. 변경내역서(신규공종 일위대가표) 1부.

2. 제비율검증결과 1부.

3. 맨홀정비 대상(별첨) 1부.

4. 방침서 3부. 끝.