문서번호	시설관리과-30311
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김철수	최명익	11/12 나태산

서울경찰청~독립문사거리간 송배수관 정비공사에 따른 현장 보고

2014. 11

시설관리과

「서울경찰청~독립문역사거리간 송배수관 정비공사」업무 수행중 다음과 같은 사항이 있어 보고 합니다

1. 공 사 명: 서울경찰청~독립문역사거리간 송배수관 정비공사

2. 공사개요: D=400~500mm, L=1090m

3. 공 사 비: 1,632,654천원(도급비 793,867, 관급비 330,000, 복구비 및 기타 508,787)

4. 공사기간: 2014. 8. 20 ~ 2015. 2. 15

5. 시 공 사: 세창건설(주) 이병준

6. 감    독: 서울시설관리공단 공사감독2처 노경호

7. 보고내용

○ 일부 관급자재(80mm이상 이형관)가 수도자재관리센터의 재고량 부족으로 수급이       원활하지 않아, 공사진행에 지장을 초래하고 있어 시설관리공단에서 사급자재로          변경하여 공사를 진행코자 하는 사항임

(관련문서 공사감독2처-18082, 2014.10.27)

8. 보고자의견

○ 2014년 12월 1일부터 도로굴착통제와 관련하여 공사의 시급성을 감안              수도자재관리센터의 미보유 자재에 대하여는 시설관리공단의 의견과 같이               KC.KS인증된 사급자재로 변경사용토록 승인코자 합니다. 끝.