문서번호	생활환경과-15801
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	클린도로운영팀장	생활환경과장
차혁진	장동은	11/13 심상원

「2014년 압착진개 청소차 적재함 패커커버 제작구매 설치 선급금 지급 검토보고(‘14. 11월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

기후환경본부

[생활환경과]

「2014년 압착진개 청소차 적재함 패커커버 제작구매 설치」

선급금 지급 검토보고(‘14. 11월)

우리과에서 시행 중인 「2014년 압착진개 청소차 적재함 패커커버 제작구매 설치」와 관련하여 ‘14. 11월 제작공정 과정을 아래와 같이 보고하고 선급금 지급하고자 함

Ⅰ		계 약 현 황

○ 업    체 : (주)에이엠특장  대표 윤 홍 식

○ 계약일자 : ‘14. 10. 15.

○ 계약금액 : 금97,000천원(금구천칠백만원)

○ 계약기한 : ‘14. 12. 14

Ⅱ		발주내용 및 진행상황

1		제작설치 주요내용

○ 제작설치내용

구 분	제 작 설 치 내 용
패커커버 설치	․ FRP소재 좌․우측 각 상하 각 2조 총 4개 1Set로 설치 ․ 금형표면 정밀가공 처리하고, 돌출부가 없도록 매끈하게 설치 ․ 설치후 수리 등 관리가 용이하도록 설치
후방카메라 설치	․ 기존 청소차에 설치된 후방카메라(27만화소)와 동급 이상의 사양 ․ 투입구 상부에 고정하여 운전자가 환경미화원의 작업상황을 파악할 수 있는 구조로 설치
쌍방향 통신기기	․ 기존 후방카메라 및 통신기기와 동급 이상의 사양 ․ 운전자와 환경미화원이 상호 통신가능한 사양 ․ 투입구 상부에 후방카메라와 같이 설치하거나 환경미화원이 직접 휴대 또는 복장에 고정하는 구조로 설치
투입구 자동도아	․ 압착진개 청소차 쓰레기 투입구 자동 개폐장치 ․ 쓰레기 수거 작업시에는 개방하였다가 이동중에는 폐쇄하는 구조로 설치
청소차 외관 도색	․ 기능 및 구조를 개선하고 최종 도장 및 도색 실시 ․ 도장시 서울시 환경위생차량 디자인 가이드라인에 따라 실시

2		진행상황 및 공정

○ 패커커버 제작을 위한 금형을 11월 3일까지 제작함

○ 커버제작후 시제품 제작 및 차량에 적용시험

○ 슬라이딩 도어 소재 구입 및 가공

○ 후방카메라 및 통신기기 시제품 구입 등

※ 붙임 공정표 및 대상차량 내역 참조

3		제작공정상 문제점 및 해결

○ 대상차량 선정 및 차량 입, 출고에 따른 운휴 부담감 최소화

○ 12년이후 출고차량중 자치구 및 대행업체 편중되어 각 자치구 1대씩       시범적용 불가하여 자치구 중복허용

○ 차량 탁송에 따른 추가 비용발생에 대해 제작사 부담으로 추진

○ 쌍방향 통신기기 구매중 통신기기 특성상 손작동이 필수적이므로       손작동 대체방법 연구 중

Ⅲ		제작공정 평 가

○ 패커커버 제작을 위한 금형제작과 시제품을 청소차량에 적용하기 위하여 제작 및 납품중에 있으며 11.14일 현장 도착예정

※ 중국에서 제작하여 도입하는 과정에 있으며 11.12 현재 세관통관 중

○ 슬라이딩 도어 시제품 1대분 제작하여 청소차량 적용한 결과 양호하여 나머지 14대분 제작중에 있으며 21일경 완성예정

○ 사전작업이 끝나고 11월 11일부터 차량에 적용할 예정이었으나 제작공정 지연으로 1주일정도 지연되나 제작차량 대수를 조정하여 전체일정에는 이상없도록 조치함

Ⅳ		선급금 지급내역

○ 선급금액 : 금45,350,000원(금사천오백삼십오만원) 46.75%

○ 예산과목 : (정책)클린도시조성, (단위)쾌적한 도시환경 조성, (세부사업)청소차량 청결도향상 개선사업 추진, (통계목)사무관리비(201-01)

따로붙임	1. 제작공정표 1부.

2. 대상차량 내역 1부.  끝.