문서번호	기술심사담당관-17294
결재일자	2013.10.25.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제331호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
박성수	박준익	최진선		10/25 김병하
협 조
	조경심사팀장		박미애
	설비심사팀장		김태기
	건축심사팀장		박효석
	토목심사팀장		박동욱
	기술관리팀장		이학구

건설공사장 특별안전점검 결과 보고

2013. 10

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

건설공사장 특별안전점검 점검결과 보고

우리 시에서 시행중인 대형 건설공사장에 대하여 외부전문가 합동 특별 안전점검을 실시하고, 점검결과 및 향후 조치계획을 보고 드림

Ⅰ				점 검 개 요

점검대상 : 본부 시행 48개 건설공사장

도시기반시설본부(42), 상수도사업본부(5), 한강사업본부(1)

점검기간 : 2013. 9. 30(월) ~ 10.14(월) (9일간)

점검반 : 7개팀 46명 [외부전문가 31명, 직원 15명]

반별 3명 [외부전문가 2명, 직원 1명]

전문성 제고 와 안전점검강화를 위해 기술분야 및 안전분야 전문가

점검반 편성 (총괄 : 기술심사담당관)

계	도시기반시설본부					상수도 사업본부	한 강 사업본부
	토목부		건축부 공공시설부	설비부	도 시 철도국
48	11	12	4	2	13	5	1
7개팀	심 사 총괄팀	토 목 심사팀	건 축 심사팀	설 비 심사팀	기 술 관리팀	기 술 지원팀	조 경 심사팀

주요 점검내용

공사장 시공관리 실태 및 안전관리 운영실태 적정여부

가시설 및 지장물 등에 대한 안전시공 실태

공사 품질관리 적정성 (규격, 품질, 균열, 방수 등)

보행자·차량 통행안전 등 시민불편 요인

기타 작업안전 수칙 준수 및 안전시설관리 실태 등

Ⅱ				점 검 결 과

▷ 대부분 공사현장에서 안전, 품질, 환경 관리 수준 향상을 위한 현장관리와 시민 불편 해소를 위한 작업장 정리정돈 등에 최선을 다하고 있으나,

▷ 점검대상 공사 특성상 대형 중장비를 이용하여 공사가 진행되고 있어 세부적인 안전관리가 필요하며, 또한 장기간 공사가 진행 되므로 가시설(Earth Anchor)등에 대한 지속적인 관리가 요망됨

▷ 구조물 시공음부 철근에 대한 녹 방지, 이물질 제거와 주요 구조물 균열 및 누수에 대한 관리가 필요함

▷ 일부 현장에서는 공사용 자재의 보관 방법이 미흡하고, 건설 폐기물 방치 등 공사잔재 정리가 미진하여 작업환경을 저해하고 있어 정비 필요

▷ 또한 지하 구조물에 내부 마감 작업시 환기 및 분진 등에 대한 작업환경개선이 필요함,

【총 평】

점검결과 지적사항

총 지적건수 : 174건

- 보완시공 14건, 현장시정 138, 기타(개선 검토 등) 22건

※ 권고사항 9건, 수범사례 3건

기관별 지적현황

(단위 : 건)

기 관 별		점검대상 공사장	지적사항
			계	보완시공	현장시정	기타
계		48	174	14	138	22
도시기반시설본부		42	152	13	120	19
	- 시 설 국	29	92	3	75	14
	- 도시철도국	13	60	10	45	5
상수도사업본부		5	18		17	1
한강사업본부		1	4	1	1	2

유형별 지적현황

(단위 : 건)

기 관 별	계	수방	품질	안전	환경	공정
계	174	3	47	112	10	2
도시기반시설본부	152	3	38	102	8	1
상수도사업본부	18		7	9	1	1
한강사업본부	4		2	1	1	-

Ⅲ				조 치 계 획

지적사항은 점검당일 현장에서 시공사 및 감리단에 통보(전달)하여 즉시 시정토록 조치하였으며, 이에 대한 시정결과를 제출토록('13.10.30까지 수합) 공사 시행부서에 공문 통보

즉시 시정이 가능한 사항은 바로 조치하고, 그 결과를 전․후 사진 첨부하여 제출

즉시 시정이 어려운 사항은 구체적인 조치계획 제출

점검시 “권고사항”은 발주처에서 자체 계획 수립 조치

공사장 관리부서에서는 수시 현장점검을 실시하고, 지적사항 보완 및

현장근무자 안전교육 시행

붙임 : 1. 건설공사 특별안전점검 주요 지적사항 (현황사진) 1부.

2. 공사현장별 지적내용 및 조치계획 1부.

(도시기반본부,상수도사업본부,상수도사업본부)

3. 공사장별 점검자 현황 1부. 끝.