문서번호	시설과-6986
결재일자	2013.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
이경훈	박기범	이상홍		전결 10/26 김준기
협 조

수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물 처리용역

준공기간 연기(전체 및 4차분)계획 보고

2013. 10.

상수도사업본부

(급 수 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물 처리용역

준공기간 연기(전체 및 4차분)계획 보고

수서배수지 건설공사의 준공기한 연기와 관련 부대사업인 『수서배수지 건설공사 외 1건 폐기물 처리용역』의 준공기간 연기계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 수서배수지 건설공사 준공기간 연기(전체 및 3차분)계획 보고(시설과-6574호,’13.10.11)

폐기물 처리용역 개요

○ 용 역 명 : 수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물 처리용역

○ 규    모 : 건설폐기물 운반 3,275.6㎥, 처리 7,686톤

○ 기    간 : ′11. 7. 29 ~ ′13. 10. 31(4차분 '13. 7. 28 ~ '13. 10. 31)

○ 도 급 비 : 145,255,000원(4차분 35,445,800원)

○ 도 급 자 : ㈜조광환경산업개발 대표 조만기

폐기물처리용역 업체 준공기한 연기 요청내용

※ 관련문서 : “수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물처리용역”계약기간 연장의 건<조광-131022-02호,’13.10.22> - (첨부 2)

○ 준공기한 연기 사유

- 수서배수지 건설공사의 준공기한 연장으로 인한 폐기물처리용역의 전체 및 4차분 준공기한 연기

○ 준공기한 연기 요청내용

건명	구분	계약금액(원)	용역기간(착공일 기준)
			당초	변경	증·감
수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물 처리용역	전체	145,255,000	’11.7.29 ~’13.10.31	’11.7.29 ~’13.12.31	증 61일
	4차분	35,445,800	’13.7.28 ~’13.10.31	’13.7.28 ~’13.12.31	증 61일

※ 계약금액 변경 없음

감리사 의견

※ 관련근거 : 수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물처리용역 계약기간 연장요청 검토결과 제출<한국종합(수서)13-332호, ′13.09.27> - (첨부 3)

○ 수서배수지 건설공사의 계약기간이 연장됨에 따라 수서배수지 건설공사 외 1건 건설폐기물처리용역의 준공기한을 당초 준공예정일인 ’13.10.31에서 ’13.12.31로 연기하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

주관부서 의견

○ 건설폐기물 처리용역은 본 공사 중 발생하는 건설폐기물 처리를 위해 진행되는 사업으로

○ 금회 폐기물처리용역의 준공기한 연기는 본 공사 준공기한 연기로 인한 사항으로 감리단 의견과 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

- 준공기한

•전 체 : 당초 ’11.7.29 ~ ’13.10.31 → 변경 ’11.7.29 ~ ’13.12.31(증61일)

•4차분 : 당초 ’13.7.28 ~ ’13.10.31 → 변경 ’13.7.28 ~ ’13.12.31(증61일)

- 용 역 비 : 변경없음

- 연기사유 : 본 공사 준공기한 연기에 따른 부대사업 준공기한 연기

○ 공사계약 일반조건 제8절 1. 다. 6) 그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우로 용역업체 귀책사유 없음

첨부 : 1. 수서배수지 건설공사 준공기간 연기(전체 및 3차분)계획 보고 1부.

2. 용역업체 계약기간 연장요청서 1부.

3. 감리단 실정보고 검토의견서 1부.  끝