문서번호	토목부-22348
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		최광무	11/13 노우성
협조

포장공법 변경 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

포장공법 변경 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

서울형 자전거 도로 설치 및 유지관리 매뉴얼에 의거 자전거도로의 포장공법을  변경(투수콘포장 → 아스콘포장)코자 보고하는 사항임.

공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012. 8. 2 ～ 2014.12.31

○ 도 급 비 : 18,161백만원

○ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

현 황

○ 위 치 : 구리암사대교 남단 ~ 훈련원사거리(한강을 바라보고 좌측)

※ 우측은 자전거도로 없음

○ 개 요 : B=2~3m L=1,317m

포장기준

○ 관련근거 : 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼 5-2

○ 자전거도로 포장 종류별 포장 구성

※ 포장종류별 포장 구성

※ 설치 위치에 따른 포장공법

※ 색 상

- 자전거도로 포장의 색상은 표층 고유의 색상을 사용하는 것을 원칙으로 함

- 자전거와 차량, 자전거와 보행자간 상충이 발생하는 구간에 대하여는 시인성 확보를 위해 상충구간을 포함하여 각 양측의 10m 구간의 포장 색을 달리할 수 있음

- 평면교차로 접근부(교차로 내부는 제외)

- 차량 진· 출입부 및 이면도로

- 자전거와 보행자간 상충이 발생하는 구간

- 주변 상황을 고려하여 이용자 안전 및 원활한 흐름을 위해 필요한 구간

포장공법 및 색상검토

○ 적용단면

구 분

현 설 계

시공사 검토(안)

비  고

단 면

투스콘 포장	t=7cm
보조기층	t=8cm

박층포장	t=0.3cm
아스콘 표층포장	t=5cm
보조기층	t=20cm

시공사(안) 적용

감리단 검토의견

○ 서울시 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼의 보도부 포장방법에 제시된     보조기층 및 아스콘 포장 단면으로 변경하고, 자전거와 차량, 자전거와 보행  자간 상충이 발생되는 구간은 상충부를 포함하여 각 양측 10m는 유색 박층  포장을 적용함이 타당한 것으로 사료 됨.

○ 공사비(설계가) 현황

(단위 :천원)

구 분	단위	수량			금 액
		당초	변경	증 감	당초	변경	증 감
보조기층	㎥	219	498	증 279	7,847	14,473	증 6,626
아스콘(#78) 포장	㎡	-	2,489	증 2,489	-	2,061	증 2,061
투스콘 포장	㎡	2,716	-	감 2,716	144,063	-	감 144,063
표층 박층포장	㎡	-	797	증 797	-	49,246	증 49,246
관급자재(아스콘)	ton	297		증 297	-	23,070	증 23,070
공사비 계					151,910	88,850	감 63,060

○ 상기 검토 결과를 적용 시행함에 따라 보조기층 및 아스콘 포장은 기존 설계  단가를 적용하고 유색박층포장은 신규단가를 적용코자 하며, 이에 소요되는   공사비는 설계변경 자문회의 결과에 따라 추후 설계변경 시 반영코져 함.

공사시행 협의

○ 우리시 : 신규공종에 대하여 낙찰율 80.405% 적용

○ 도급자 : 신규공종에 대하여 협의율 100% 반영 요청

※ 협의결과 : 의견 불일치

조치 의견

○ 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경심의 결과에 따라 정산 처리함이 타당하다고 사료됨.

○ 금회 실정보고 건은 공사 시행 협의 하였으나 협의가 되지 않아 부득이 신규 공종에 대하여 공사계약일반조건 제20조2항에 따라 강제협의율(90.202%)을 적용코자 함.

붙 임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.