부 장		11/13 代박용우		과 장	이승우	심사자	임병관	설계자	안창호		설 계	심 사		결 재
											2014년 11월 일	2014년 11월 일
변 경 설 계 서(6차1회)
	용 역 명 : 서울시 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역 2공구(6차1회)
	구 분					당 초				변 경			증, 감
	총 용 역 비					402,000,000				402,000,000			-
	도급비		공 급 가 액			365,454,545				365,454,545			-
													-
			소 계			365,454,545				365,454,545			-
			부 가 가 치 세			36,545,455				36,545,455			-
			계			402,000,000				402,000,000			-
< 용역개요 > ○ 총연장 : 3,233m [본선 1,977m, 정거장 4개소 249m, 터널 1,007m] ○ 감리기간 : 당초) 2014.09.16 ~ 2014.11.14, 변경) 2014.09.16 ~ 2015. 5. 25 증) 192일