투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(아천IC 구조물 추가공사비 검토보고)

1.업무지시현장 :  구리암사대교 건설공사 (주)도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2014-11-13 00:11:00

3.지 시 내 용:

1. 암사감리2014-763호(2014.11.3.)와 관련입니다.

2. 위 대호로 검토복하신 추가공사비 반영 실정보고에 대하여 아래 사항을 보완하여 보고하시기 바랍니다.

가. 연장작업 및 휴일작업 할증을 얼마까지 반영하였는지에 대한 검토가 없고

나. 구조물공사 거푸집 전용횟수 조정의 적정성 검토의견 및 공사비 당초 변경 비교 내역 보완요

다. 위 사항과 추가공사비 적용에 대한 설계자 검토의견 및 비상주감리의 검토의견을 첨부하여 검토 보고하시기 바랍니다. 끝.

끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							조양연			광역도로과장					전결 11/13 최광무
협조자
시행			토목부-22361									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		0237082557						/전송			0237082599					/	choaral@seoul.go.kr												/	대시민공개