문서번호	조경과-5718
결재일자	2013.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		조경과장	관리부장		서울대공원장
김기배		代홍성실	양현모		10/24 안영노
협 조	총무과장			이경로
	주무관			홍성실
	주무관			이옥하
	주무관			이윤주
	주무관			장숙희

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 : (김기배,오맹렬,홍성실주무관/이성주과장)

- 실행계획자 : (김기배,오맹렬,홍성실주무관/이성주과장)

(이윤주,이옥하,장숙희,최종태,김병회,김호민주무관)

- 실행자:(홍성실,김기배,장숙희,오맹렬,최종태,김병회,김호민,이상균)

- 서울대공원 개원 30주년 기념 -

‘꽃으로 피어나는 서울대공원’ 만들기 계획

2013.  10.

서울대공원

〈조 경 과〉

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 서울대공원 개원 30주년 기념 -

‘꽃으로 피어나는 서울대공원’ 만들기 계획

서울대공원 개원 30주년(’14.5.1) 맞이 공원 및 동물원내 기존 화단 재 정비와 신규 꽃밭을 추가 조성하고, 다양한 꽃묘 등을 식재하여 관람객의 볼거리 제공과 미관 개선으로 개원 30주년 기념 홍보에 기여하고자 함.

Ⅰ
		추진개요

추진기간 :’13.10. 21 ～ ’14. 6. 20(9개월간)

대상면적 : 총 19개소 2,800㎡

동물원 내부 ⇒  15개소 2,380㎡

동물원 외부 ⇒   4개소    420㎡

※ 2013년까지는 동물원 내․외부 10개소 1,700㎡ 식재관리

식재수량 : 튤립 등 30종 64,500본

다년생 구근 초화류 : 튤립 등 10종 33,000본

1년생 초화류       : 팬지 등 20종 31,500본

소요예산 : 27,000천원

중점 추진방향

개원 30주년 기념 각종 행사계획과 연계 추진 가능한 탄력적 꽃묘식재

▸2014. 5. 1 백두산 호랑이사 리모델링 개장예정

▸어린이날(5.5) 및 벚꽃개화기 등 봄철 성수기 공원이미지 향상 제고

자체 생산 중인 구근류 분근(分根), 초화류 최대한 활용식재로 예산절감

▸양묘장, 식물원 등에서 생산중인 꽃잔디, 작약, 부용 등 활용 극대화

기존 화단 재정비 및 신규화단 추가조성으로 초화류 식재면적 확대

▸관람객 이용 주동선인 기린사, 유인원관 주변 재정비 및 신규화단 조성

▸일부 유휴공지에 아트가드너 인력 및 예산 활용하여 포켓 정원 조성

Ⅱ
		세부추진계획

제1단계 --- 신규화단 조성 및 다년생 초화류 분근∙이식

기    간 : 2013. 10. 21 ~ 12. 15.

추진내용

▸ 신규 화단조성     : 동물원 내부 등 7개소 900㎡

▸ 초화류 분근∙이식 : 작약, 부용 등 5종 11,000본

▸ 꽃잔디 번식작업   : 5,000본

▸포켓정원 조성     : 2개소 200㎡

․ 아트가드너 인력 및 사업예산 활용하여 꽃밭조성지 등에 경관연출

▸ 자체 확보되지 않은 다년생 구근류 및 부족수량 구매식재

․ 식재수량 : 21,800구(튤립14,600, 알리움1,150, 수선화4,400, 무스카리1,650)

․ 구매수량 : 튤립 등 4종 21,150구

- 튤립14,100, 알리움1,000, 수선화4,400, 무스카리1,650

․ 구매방법 : 연간단가업체 및 일반업체 구매를 통한 품질향상 유도

․ 소요예산 : 12,000천원

화단조성 장소 및 다년생 초화 분근∙이식 내역

구 분	신규 화단 조성	다년생 초화류 분근∙이식
대 상 지	□ 동물원 내부 6개소 850㎡ - 인공야자 화단 옆 녹지 200㎡ - 기린사 매점 앞 소나무 동산 220㎡ - 코끼리 관람대 주변녹지 70㎡ - 남미관 입구 주변 녹지 140㎡ - 여우사 앞 녹지 50㎡ - 유인원관 주변 녹지 170㎡ □ 동물원 외부 1개소 50㎡ - 1초소 정문 주변 50㎡	□ 장미원 화단 200㎡ - 작약 굴취∙분근 500개 □ 동물원 도움터 옆 50㎡ - 금달맞이꽃 굴취∙분근 3,500개 □ 청계 저수지 사면 150㎡ - 부용 굴취∙분근 2,000개 - 억새, 수크령 굴취∙분근 5,000본 □ 식물원, 양묘장내 1,000㎡ - 꽃잔디 등 번식 5,000본
작업내용	□ 토양 물리적 환경개선 - 제초, 예초 및 돌고르기, 경운 - 토양치환, 퇴비장 부숙퇴비 시용 등	□ 신규화단, 기존화단내 구근류 이식 - ‘13 봄철 식재후 저장중인 튤립500개, 알리움150개 포함 초화와 어우러진 배식
시행방법	□ 자체인력 및 장비활용 비예산 추진	□ 자체인력 및 장비활용 비예산 추진

※ 분근한 구근, 초본류는 동물원 입구 등 9개소 식재(별첨 장소별 식재내역 참조)

추진일정

▸ 2013.10.21~11.15 : 구근류 구매, 신규화단 조성, 시비작업 등

▸ 2013.11.16~12.15 : 구근류 식재, 아트가드너 포켓정원 조성,

월동작업 및 기타 뒷정리

제2단계 --- 봄철 초화류(1년생) 식재 및 유지관리

기    간 : 2014. 2. 20 ~ 6. 20.

추진내용

▸ 대 상 지 : 동물원 입구 등 16개소 2,600㎡

▸ 식재수량 : 팬지 등 21종 31,700본

- 구매식재 : 팬지 등 20종 26,700본

※ 연간 단가계약 업체 선정(별도 방침수립)

- 자체번식 생산 : 꽃잔디 5,000본

▸ 소요예산 : 15,000천원

▸ 식재방법 : 자체인력 활용 식재

장소별 식재 초종 및 수량

(단위 : ㎡/주/개)

식재 장소	면 적	초화류	수 량	식재 장소	면 적	초화류	수 량
합계 16개소	2,600	21종	31,700	식물원 입구주변	260	팬지등18종	5,050
동물원 입구	80	팬지등5종	2,500	유인원관 주변	170	팬지등9종	2,300
인공야자 화단	190	꽃잔디등5종	2,500	화장실 1(얼룩말)	50	팬지등4종	1,100
〃화단옆 녹지	200	클레마등4종	1,050	화장실 2(얼룩말)	50	팬지등5종	1,100
기린사 소나무동산	220	팬지등2종	0	대형화분(31)		팬지등6종	2,500
남미관 주변	140	팬지등5종	2,050	1초소 정문	50	팬지등3종	1,050
코끼리 관람대 주변	70	밀렛등3종	50	종안소분수대	170	팬지등2종	0
꽃동산 녹지대	700	팬지등5종	5,000	장미원 입구	30	팬지등8종	850
여우사 앞 녹지	50	팬지등5종	1,100	호랑이상 주변	170	팬지등5종	3,500

추진일정

▸ 2014. 2.20~3. 5 : 단계계약업체 선정, 꽃묘구매

▸ 2014. 3.  6~3.10 : 부숙퇴비 시용, 지반정리, 꽃묘식재

▸ 2014. 3.11~6.20 : 급수작업, 폐화 및 초종교체, 보식 등 유지관리

Ⅲ
		행정사항

꽃묘 구매 등 소요예산 집행 ----- 27,000천원

다년생 구근류 : 12,000천원

1년생 초화류 : 15,000천원

▸ 예산과목 : 산림내이용시설 및 조경관리강화, 꽃동산조성및조경시설물 유지관리, 재료비

▸ 예산과목 : 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 식물원 및 동물사 조경관리, 재료비

▸ 예산과목 : 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영, 장미원 유지관리, 재료비

▸ 예산과목 : 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영, 식물전시 및 축제프로그램, 재료비

화단조성 및 꽃묘식재는 팀별 분담식재, 관리

조경시설팀 : 동물원 입구 등 10개소

식물전시팀 : 식물원 입구 등  3개소

공원디자인팀 : 화장실 주변 등  5개소(포켓정원 2개소 포함)

Ⅳ
		기대효과

예산절감 및 저비용 투자로 다채로운 공원분위기 연출

공원 관람객의 볼거리 제공으로 다시 찾고 싶은 공원 이미지 제고

서울대공원 개원 30주년 맞이 기념행사 등 대대적 홍보효과 극대화

붙 임  1. 장소별 꽃묘식재 세부 내역 1부.

2. 분근 이식대상 등 현황사진 1부.  끝.