문서번호	도로보수과-9957
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최진규	이석재	11/13 이승진

설계변경 시행계획(제2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(도로보수과)

「2014년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)」

설계변경 시행계획(제2회)

「2014년 도로파손 긴급복구공사」 시행중 현장여건에 따른 변경사항이 있어 아래와 같이 설계변경 시행코자 함

1. 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 소규모포장복구 74a, 절삭 덧씌우기 112a, 출동․대기 380hr

○ 공 사 비 : 1,104,239,650원

- 도급비 737,189,650원, 관급비 347,050,000원, 이전비 20,000,000원

○ 공사기간 : ‘14.04.08 ~ ’15.02.28

○ 도 급 자 : 유비럭스(주) 대표 김 영 근

2. 설계변경 사유

○ ‘14년 하반기 예산 추가 재배정에 따른 정비물량 증가 및 신규공종 추가

○ 공종별 정비물량 조정에 따른 관급자재량 변경

○ 기타 물량 증․감

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	1,104,239,650	2,078,000,000	증)973,760,350
도 급 비	737,189,650	1,389,480,000	증)652,290,350
관 급 비	347,050,000	670,470,000	증)323,420,000
이 전 비	20,000,000	18,050,000	감)1,950,000

4. 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임  변경내역서 1부. 끝.