문서번호	녹색에너지과-14969
결재일자	2013.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호	서울특별시장 방침 제219호

					시 민
주무관	녹색에너지과장	기후환경본부장	행정1부시장		서울특별시장
정춘용	권민	임옥기	代최동윤		08/01 박원순
협 조
	상수도사업본부장			정연찬
	기후변화정책관			김용복
	경영관리부장			전영석
	생산부장			박용철
	시설관리부장			윤석우
	햇빛발전팀장			최철웅

상수도시설을 활용한「햇빛발전소」설치 계획

2013.  7

기후환경본부

(녹색에너지과)

작 성 자	녹색에너지과장 : 권 민☎2133-3550 햇빛발전팀장 : 최철웅☎3564 담당 : 정춘용☎3568

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 ■
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 ■	(	태양광발전 투자협약 MOU체결사	)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

상수도시설을 활용한「햇빛발전소」설치 계획

암사아리수정수센터 태양광발전시설의 성공적 설치 사례를 토대로 아리수 생산․공급 과정의 에너지자립률을 제고하고 대정전 등 유사시에도 필수기능을 유지토록 함으로써 시민불편을 방지하기 위한 태양광발전시설 설치 계획임.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진목표 : 20㎿

암사태양광발전소 공사현장

□ 정수센터, 취수장, 배수지, 가압장, 사무용건물 미활용 공간 활용

- 고도정수처리시설 옥상 조경계획을 태양광 설치로 변경 추진

□ 소요예산 : 약 600억원(전액 민간투자)

□ 추진방향

□ 기존 깨끗한 음용수 생산․공급시설에 친환경에너지 생산시설 이미지 부가

- 태양광발전시설 설치 공사시 조망 및 견학코스 신설

□ 고유의 기능 및 시설을 훼손하지 않는 범위 내 설치

- 각 시공 단계별로 시설관리자 의견 수렴 및 반영 추진

□ 계약기간 종료 후 원상복구 원칙(시설물이 양호할 경우 인수 가능)

□ 소규모 설치부지(청사, 취수장 등) 경우 협동조합 등 시민 참여 확대

□ 고도처리시설의 경우 에너지 복지 출연 및 시민 참여모델 도입

□ 추진체계

Ⅱ		추 진 경 과

□ 원전하나 줄이기 종합대책 시행 : '12. 5. 8

□ '14년까지 태양광발전시설 총 320MW 설치

⇒ 서울의 모든 건축물이 태양광발전시설이 되는 “햇빛도시 건설”

□ 민간자본 유치를 위한 MOU 체결 : 총 250MW

□ '12년 : OCI․에너지나눔과평화, 한화큐셀, 한수원

□ '13년 : 태양광산업협회, 코원에너지서비스(SK E&S)

※ SK E&S 서울시 발생 신재생에너지공급인증서 구매(2㎿) 예정

□ 민간자본을 활용한 햇빛발전소 설치 방침 수립 : '12.10.26

□ 서울시 : 태양광발전소 설치공간 제공 및 인허가 지원

※ 설치공간 사용료 : 25,000원/㎾ (1㎿ 설치시 연간 2,500만원)

□ MOU社 : 건설 및 운영 비용 투자, 시설운영 및 유지관리 실시

□ 시범사업 실시 : '13.7~9월 준공예정

□ 암사(5㎿), 광암(1.0㎿-허가중), 강서농산물시장(1.3㎿), 양곡창고(0.4㎾)

□ 상수도 설치부지 조사 및 추진경위

□ 태양광전문시공업체 합동 현장조사 실시 : '12.12 ~ '13.4

- 설치가능 장소 및 용량 산출

- 설치부지 도시계획 및 개발계획 확인

□ 설치부지별 기본사업계획서 검토 및 의견제출 : '13.5

- 설치예정 시설에 대한 자산관리부서 의견 수렴

※ 뚝도아리수정수센터의 경우 시설정비공사 후 시행 예정

□ 행정1부시장 주재 소관 공공시설 민자 태양광설치 추진 검토보고('13. 5)

Ⅲ		추 진 계 획

□ 설치부지 및 용량 : 13개소 총 20㎿

구 분	시 설 명	설치가능 용량(kW)	설 치 장 소
합 계		20,000
정수센터	암사	5,000	시범사업 추진 중('13.7월 준공)
	광암	1,000	시범사업 추진 중('13.9월 준공)
	암사 고도정수시설	1,200	고도정수시설 상부 추가설치
	구의	800	침전지, 여과지 상부
	영등포	2,000	침전지, 여과지 상부
	강북	9,000	침전지, 정수지, 여과지 상부
취수장	구의	300	건축물 상부
	뚝도	50	“

구 분	시 설 명	설치가능 용량(kW)	설 치 장 소
취수장	풍납	50	건축물 상부
	강북	500	“
배수지	방배	40	“
청사건물	중부수도사업소	30	“
	남부수도사업소	30	“

□ 추진방법

□ 추진 주체별 담당업무

추진 주체		담당업무
상수도사업본부	생산관리부	- 사업추진 총괄
	자산관리부서 (정수사업소, 수도사업소)	- 부지사용계약 - 공정 관리감독
기후환경본부	녹색에너지과	- 기본계획 수립 - 실시협약 체결
MOU체결사	OCI․에너지나눔과평화 SK(코원에너지서비스), 시민햇빛협동조합	- 제안서 제출 - 발전소 설치․운영 - 추진사항 보고

□ 사용허가 기간 : 10년

- 1회에 한하여 10년 이내 범위를 정하여 연장 가능(신재생에너지법 제26조)

□ 사 용 료 : 1㎾ 당 25,000원/년(서울특별시 에너지조례 제25조 제4항)

□ 추진절차

기본계획수립	⇒	제안서 제출	⇒	협약체결	⇒	부지 사용계약	⇒	착공․발전
기후환경본부		MOU社		기후환경본부		자산관리부서		MOU社 (자산관리부서)

Ⅳ		기 대 효 과

□ 임대료 수입 : 5억원/년

□ 20년 임대시 총 100억원 수입 효과

□ 녹색일자리 증대 등 경제활성화

□ 발전시설 설치비 600억원 투자 및 약 710명 신규 일자리 창출 효과

※ 1㎿ 당 설치비 30억원, 1㎿ 설치시 고용창출 35.5명(삼성경제연구원)

□ 아리수정수센터에 대한 친환경 이미지 제고

□ 친환경 재생에너지 생산을 통한 환경오염물질 배출량 저감

□ 정수시설의 에너지생산 기지화, 서울시 에너지 자립도 제고

□ 옥상조경에 따른 시설공사비, 유지관리비 절감

□ 전력자급 기반 확충 : 연 5,700TOE 절감

□ 전력생산량 : 20MW × 3.2시간 × 365일 = 23,360㎿h/년

Ⅴ		향 후 계 획

□ 설치장소 확정 및 실시협약 체결 : '13.8월중

□ 협약체결 주체 : 서울시(녹색에너지과) 및 MOU체결기업

□ 설치공간 사용계약 체결 : '13.8월중

□ 체결주체 : 서울시(자산관리부서) 및 특수목적법인(SPC)

□ 세부 실시설계 및 발전소 건설 착수 : '13.9월부터

붙임 : 1. 태양광발전소 건설 부지현황(상수도시설) 1부.

2. 암사정수장 태양광발전소 개요           1부.  끝.