문서번호	마곡조성담당관-5916
결재일자	2013.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	代이기원	하종현		08/01 서노원
협 조

단지조성 공정점검(10차) 결과 보고

2013. 8.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

단지조성 공정점검(10차) 결과보고

Ⅰ		점검개요

일   시 : ′13. 7. 31(수) 13:40~16:10

장   소 :  마곡 1공구 현장사무실

참 석 자 : 마곡조성담당관 (과장, 토목계획팀장),

SH공사 (토목조경팀장)

현장소장, 현장감리단장 (1▪2공구, 빗물펌프장)

안   건 : 단지조성 공정 진행상황 점검 및 추진대책

〔공정현황〕

○ 단지조성공사 : 공정률 38.7%

- 간선하수박스   : 1,115m중  995m 완료 (89.2%)

- 공동구(1공구)   : 1,158m중  690m 완료 (60.0%)

(2공구)  : 1,521m중 1,081m 완료 (71.0%)

○ 신설 빗물펌프장 : 공정률 22.0%

- 펌프장 구조물 : 기초 어스앵커 천공 및 인장

- 토출암거 : 올림픽대로 지장물에 따른 BTR추진공 작업대기

Ⅱ		점검결과 및 조치

빗물펌프장 공사는 완벽한 제방안전이 확보되도록 철저한 안전대책 수립 시행

- 제방상부 감시카메라, 지반변위·계측 등이 상호 연계되어 자동으로 제방의 이상 유무를 사전에 감지할 수 있도록 하고, 시간대별 감시 책임자 지정 등 상시 감시체계를 확립하여 이상 발생 징후시 사전에 즉시 대처할 수 있도록 조치

- 제방하부 통과부분 전체구간에 대하여 완전한 제방안전 확보방안 강구

- 제방사면 덮개는 변이현황을 육안 관측 가능토록 조치하고, 배수로는  적절한 위치로 원활하고 안전한 배수가 될 수 있도록 조치

공항로 구조개선 공사 등은 1단계 공동주택 입주에 불편이 없도록  공정관리 철저

공사장내 완벽한 안전확보를 최우선하고, 현장의 사고발생이   없도록 안전관리/취약지역 점검정비 등 관리감독 철저