문서번호	설비부-12751
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
박태욱	이달영	11/13 박기형

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

설계변경(총괄5차, 4차4회) 검토 보고

2014. 11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

설계변경(총괄5차, 4차4회) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」와 관련하여 시설공단 등의 요구사항 및 물가변동에 따른 계약금액 조정(ESC 5회)에 대한 설계변경 사항을 검토 보고함.

관련근거

❍ 동기공 2014-4228(2014.11.10.)호 「설계변경도서 제출(총괄5회, 4차4회)

공사개요

❍ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사

❍ 위     치  : 구로구 개봉동 198-1번지 남부순환로(개봉역앞)

❍ 규     모  : L = 2,280m (지하차도 736m, 4차선)

수전설비 450kw, 가로등 113등, 지하차도등 903등

❍ 공사기간 : 2009. 08. 03 ~ 2015. 01. 30

❍ 공사금액 : ￦1,974백만원(도급 1,007백만, 관급 903백만, 이전비 64백만)

❍ 시  공  사 :(주)정안전기외 1개사

❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

감리단 보고내용

❍ 실정보고 승인사항

- 터널등기구 회로별 표찰 부착 및 피난 유도등 설치

- KBS 송신소앞 가로등 이설 및 물가변동 ESC 5회 반영

❍ 설계변경 내용

(단위 : 원)

구 분	계약금액			계약기간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
총 괄	1,007,371,000	1,044,255,050	증)36,884,050	2009.08.03. ~ 2015.01.31	변경없음
4 차	533,844,450	570,728,500	증)36,884,050	2013.08.16. ~ 2015.01.31	변경없음

❍ 주요 변경내용

(단위 : 원)

공 종	변 경 내 용			당 초	변 경	증 감	비고
지하차도 전등설비	• 터널등기구 표찰 : 822개			-	3,545,286	증)3,545,286
지하차도 표 시 등 설비	• 피난 유도표시등 : 2개			-	2,376,872	증)2,376,872
가로등설비	구 분	당 초	변 경	102,342,838	109,112,447	증)6,769,609
	등기구	113개	108개
	등 주	106본	99본
	LED120W	-	8개
	LED25W	-	19개
	램 프 안정기	113개	110개
	1등용암	99개	82개
	2등용암	7개	17개
	가로등이 설	-	5본
	베이스카 바	-	99개

❍  감리단 의견 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 시행중 구로구청 및 시설공단의 요청에 의한 사항 및 ESC 5회에 의한 변경사항을 검토한 바, 적합하다고 판단함.

조치의견

❍ 설계변경에 대한 감리단의 보고내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되므로            설계변경을 시행코자함.

붙임 : 책임감리원 실정보고서 1부. 끝.