다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역계약 변경요청

평창동 문화복합시설건립 타당성조사 및 기본계획수립 용역과 관련하여 아래와 같이 계약변경하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 평창동 문화복합시설건립 타당성조사 및 기본계획수립

나. 계약년월일 : 2014. 6. 18 ~ 2014. 11. 17

다. 용역 기간 : 2014. 6. 18 ~ 2014. 12. 31

라. 용역 업체 : 서울시립대학교 산학협력단 대표자 : 황은성

마. 변경 내용

구 분	최초 계약	변경 계약
용역 기간	'14.6.18 ∼ '14.11.17	'14.6.18 ∼ '14.12.31
용역 금액	25,279,000원	28,780,000원
과업 추가	과업내용서	과업 추가 ※계약변경 사유 참고

따로붙임 :  1. 합의 각서 1부.(원본 별도송부)

2. 과업내용서(변경) 1부.

3. 산출내역서(변경) 1부.

4. 계약기간 변경사유서 1부.  끝.

	문화정책과장
주무관	박기철		문화시설팀장	이영미		문화정책과장	11/13 정헌재
협조자
시행	문화정책과-13973	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문동 37) 시청별관 1동 4층 문화정책과	/
전화	2133-2534	/전송	2133-1059	/	pkc1019@seoul.go.kr	/	부분공개(5)