문서번호	시설보수과-8124
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		정재현	11/13 이승진
협조

방음벽추가 설치공사 발주계획 보고

(화랑고가차도)

2014.11

북부도로사업소

시설보수과

방음벽추가 설치공사 발주계획 보고

(화랑고가차도)

화랑고가차도에 대하여 인근 우남아파트 주민 및 국회의원(이노근, 새누리당)으로부터 아파트 차량 소음 저감을 위한 방음벽 개선요청 사항에 대한 도로시설과 지시사항에 따른 추가 방음벽 설치 발주계획을 보고합니다.

□ 관련근거 : 도로시설과 – 18950(2014.10.29.)호

- 화랑고가 방음벽 개선요청에 따른 관련사항 알림

□ 시설물 현황

시설물명	종별	상태 등급	위 치	준공일	규 모		구조형식
					폭	연장
화랑고가차도	법2종	B	노원구 월계동 38-4	1984	15.4m	479m	PSC STB

□ 공사개요

○ 공사내역 : 방음벽(황변없는 아크릴)설치 64m(방음벽 높이 1m + 감쇄기 설치)

○ 총사업비 : 120백만원

○ 사업기간 : 2014. 11.   ~ 2014. 12. 31

□ 추진현황 및 향후 계획

○ ‘14. 10. 10 : 국회의원(이노근,새누리당)지시에 따른 화랑고가 소음현장 조사 실시(도로시설과,방음벽 설치회사,외부전문가,도로사업소 합동 점검)

○ ‘14. 10. 15 : 소음조사 결과 보고(도로시설과 → 국회의원)

○ ‘14. 10. 22 : 국회의원,지역주민,도로시설과,사업소, 우남아파트현장 합동 협의

○ ‘14. 10. 29 : 방음벽 개선 추진계획 수립(도로시설과)

- 우남아파트앞 64m 설치 소요예산 1.2억

○ ‘14. 11.    : 공사발주 및 착수

○ ‘14. 12.    : 공사준공

□ 발주 계획

○ 계약방법 : 수의계약

○ 수의계약 사유

. 화랑고가차도에 기 설치된 방음벽은 2011년 화랑고가 보수공사(구조물)시

설치한 것으로 설치된 제품이 완충형투명방음판(W:2,000×H:2,000/강화접

합유리 12.76T)으로 특허(제10********호) 및 디자인 특허(제30********)등

록 제품으로 사각프레임을 사용하지 않는 전면개방형 투명 방음판으로써

방음판을 스프링지지 장치만을 사용하여 지주와 투명판을 결합하는 구조로

서울시 도시디자인 조례상 사용을 권장하는 우수디자인 제품으로 대용품이

나 대체용품이 없어 2010.12 서울시 디자인심의에서 선정되어 수의계약

체결 설치한 것으로,

. 본 공사는 기 설치된 방음벽위에 추가로 설치하는 사업으로써 공사시행을

위하여는 기존 방음벽을 제거하고 지주를 보강한 후 기존 방음벽 재 설치 및

추가 방음벽을 설치하여야 하기에 추후 하자에 대한 책임구분이 곤란하여

기 제품 설치회사와 계약하는 것이 바람직 할 것으로 판단되어『지방자치

단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 시행령 제25조1) 4항2) 가목3)』에

의거 수의계약 시행

○ 공사발주 : 2014. 11.

붙  임 : 1) 방음벽개선 요청공문 1부.

2) 2011년 수의계약 검토 자문서 및 사유서 등 1부.

3) 수의계약 사유서 .끝.

1)※ 제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우)

2) 4. 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을         할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우
3) 가. 공사에서 장래 시설물의 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우로서 안전행정부장관이 정         하는 기준에 적합한 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우