문서번호	고도정수반-5704
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장	시설안전부장
송병욱		남정열	11/13 이규상
협조

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

2014년 건설사업관리자 선투입 검토 보고

2014. 11

상수도사업본부

(시설안전부)

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

2014년 건설사업관리자 선투입 검토 보고

뚝도 건설사업관리용역 계약이 당초 ‘14.12.25일까지로 연말까지의 공백기간에 대하여 선투입하고 ’15년 7차분 내역에 반영요청에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		검토 근거

건설사업관리자 선 투입 검토 보고[도화(감리)2014-11570] : ‘14.10.22

Ⅱ		검토 내용

1. 용역개요

- 용역명 : 뜩도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설사업관리용역

- 계약금액 : 4,607,700천원(6차분 : 1,003,200천원)

- 용역기간 : 2009. 5.25 ~ 2014.12.25(총괄)

: 2014. 1. 2 ~ 2014.12.25(6차)

- 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링, ㈜한국종합엔지니어링

2. 검토사항

- 뚝도 건설사업관리 용역기간의 종료일은 2014.12.25일로 공사기간 연장에
따른 용역기간 연장이 필요한 실정이며, 12.25일 이후 6일간의 공백발생과

- 특히 용역의 주요분야인 토목분야는 ‘14.10.30.~12.31까지 공백발생으로         건설사업관리에 차질이 우려됨.

※ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사의 공사기간 연장 승인

☞ 고도정수반-4957(2014.10.10.) : 2015. 1. 6 ⇒  2016.12.31.(725일)

Ⅲ		CM 검토의견

2014년 6차분 건설사업관리 용역기간이 2014. 1. 2~2014.12.25.(359일)로 계약되어 있어 공백기간 발생으로 용역수행 차질 및 이로인한 시설공사의 공정관리에 차질이 우려되므로,

2014년 건설사업관리자의 투입계획에 대하여 선 투입(’14.12.26.~’14.12.31. 6일)(토목 : ’14.10.30~’14.12.31. 63일)하고 선 투입분에 대해서는 7차발주(2015년)내역에 반영하여 건설사업관리를 요청함

Ⅳ		보고자 검토의견

위 사항은 건설사업관리자 공백기간에 대한 선투입 요청건으로 2015년도 건설사업관리용역 투입계획서 작성시 내역에 반영하도록 승인 조치코자 함.

붙 임 : 관련 공문. 1부.  끝.