의원 요구 자료 제출

시 행	도시철도사업부-5893
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		경전철1과장	도시철도사업부장	도시철도국장	도시기반시설본부장	결재
안규홍		박동룡	代박용우	김준기	09/23 천석현
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 425번, 이윤희 시의원, 환경수자원위원회)

따로붙임 : 이윤희 시의원 요구자료 1부.  끝.

이윤희 시의원(환경수자원위원회, 새정치민주연합)

□ 요구번호 : 425번

□ 요구자료

1. 경전철(정릉~성신여대~보문~신설동 구간)공사의 그동안의 추진현황과 향후계획

2. 보문역 엘리베이터 설치계획과 현재 추진현황

□ 정릉~성신여대~보문~신설동 구간 공사의 그 동안 추진현황과 향후계획

○ 추진현황

- 2009.9.15.일 공사 착공 이후 본선은 토공사 및 터널 구조물 공사 완료

- 정거장은 토공사 완료 후, 구조물 공사 추진 중임('15.5월 완료 예정)

○ 향후계획

- 2015년 : 궤도, 전차선, 신호, 통신, 건축마감 공사 및 개별시험 실시

- 2016년 : 공사 완공 예정

□ 보문역 엘리베이터 설치계획과 현재 추진현황

○ 설치계획 : 외부 E/V 15인승 1대, 내부 E/V 15인승 2대【따로붙임】

○ 현재 추진현황 : 정거장 구조물공사 완료 이후 기존 6호선 보문역에 외부 엘리베이터 설치('15.5월 이후)

※ 우이경전철에는 별도 외부출입구 설치 없이 6호선 출입구 활용하는 것으로 계획

※ 외부 E/V설치 위치에 근접한 건물주가 건물 안전, 시야차단, 보도폭 협소(1.7m)로 인한 영업피해 및 재산가치 하락 등의 사유로 설치 반대

붙 임 : 보문역 엘리베이터 설치 계획 1부.   끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (도시철도사업부)	담당사무관	박 동 룡
	☎ 772-7179	주 무 관	안 규 홍
	작 성 일 : 2014. 9. 22