기성부분검사(감독) 조서(갑)[우이 경량전철 궤도공사 감리용역(1차 2회)]

문서번호	도시철도토목부-12517
수 신 자	건설총괄부장
접수번호

결재	주무관		궤도과장		도시철도토목부장
		임준호		홍숭희		11/14 한동근
협조

용 역 명	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 궤도공사 전면책임감리용역(1차)
계 약 자	동부엔지니어링(주) 대표 이 문 규 외 2
계약금액	금427,000,000원				기성부분 준공금액		금215,000,000원
계약일자	2013년 03 월 27 일				착공일자		2013년 04 월 01 일
준공기한	2015년 02 월 16 일				부분기성 일 자		2014년 02월 20일 ~ 2014년 10월 31일
기성검사일자	2014년 11 월 13 일
참고사항	- 전회까지 기성금액 : ￦ 74,000,000원(기성율 9.74%) - 금회 기성금액 : ￦215,000,000원(기성율 57.94%) - 누계 기성금액 : ￦289,000,000원(기성율 67.68%)
위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 완료되었기에 본 조서를 제출함.
2014 년 11 월 14 일
현장감독공무원		도시철도토목	부	지방시설주사		직		성명	성 원 배		성원배
검 사 자		도시철도토목	부	지방시설주사		직		성명	윤 원 섭		윤원섭
검 사 자		도시철도토목	부	지방시설주사보		직		성명	조 태 현		조태현
서울특별시 도시기반시설본부(분임)경리관 귀하

기성검사 내역서(1차 2회)

1. 용 역 명 : 우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 궤도공사 전면책임감리용역(1차)

2. 계 약 자 : 동부엔지니어링(주) 대표 이문규 외 2

3. 계약금액 : 一金 사억이천칠백만원정(금427,000,000원)

4. 기성금액

○ 전회까지 기성 : 금 74,000,000원

○ 금 회 기 성 : 금215,000,000원

○ 누 계 기 성 : 금289,000,000원(67.68%)

5. 내 역 서

기간 : 2014.02.20 ~ 2014.10.31  (단위 : 원)

공 종	수량	단위	계약금액	기 성 금 액			비고 (누 계 기성고)
				전 회 기성금액	금 회 기성금액	누 계
1. 궤도 전면책임감리	1	식	383,554,819	66,470,728	193,124,546	259,595,274	67.68%
2. 손해배상보증수수료	1	식	4,627,000	802,000	2,330,000	3,132,000	67.68%
소 계			388,181,819	67,272,728	195,454,546	262,727,274	67.68%
3. 부가가치세	1	식	38,818,181	6,727,272	19,545,454	26,272,726	67.68%
총 용 역 비			427,000,000	74,000,000	215,000,000	289,000,000	67.68%

끝.