투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	하도급 변경계약 통보(서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업)

1. 우리본부에서 시행하고 있는 『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업』과 관련하여 기계분야 하도급 변경 사항을 아래와 같이 통보합니다.

가. 하도급 변경내용

하도급 공종	하도급사	하도급 변경내용			비고
		구분	하도급 금액	공사기간
고도처리 탈취공사	대성기공	당초	2,204,950,000원	2012.03.30.～2014.12.31.	계약외 추가공사 및 공사 기간연장
		변경	2,962,850,000원	2012.03.30.～2015.08.09

따로붙임 : 1. 하도급 변경계약 보고 1부. 끝.

	설비부장
주무관	이호기		환경설비과장	이달영		설비부장	11/14 박기형
협조자
시행	설비부-12776	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개