투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「2013년 근교산(산림욕장) 등산로 정비공사」 공사기간 연장 시행

1. 조경과-2849(2013.5.24)호와 관련입니다.

2.「2013년 근교산(산림욕장) 등산로 정비공사』에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연장 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 근교산(산림욕장) 등산로 정비공사

나. 위   치   : 대공원 산림욕장 등산로(막계동 산108-1번지 일대)

다. 사업내용 : 목교, 활생목흙막이, 산돌쌓기, 이정표, 야외운동기구 등

라. 도 급 자 : (주)일산이엔지 대표 이인재

마. 계약금액 : 146,403천원

바. 공사기간 연장

○ 당   초 : 2013.6.18 ~ 2013.8.9

○ 변   경 : 2013.6.18 ~ 2013.9.15(37일 연장)

사. 연장사유

○ 여름 장마철 우기로 인한 공사중단(신림욕장 이용객 안전 및 공사장 재해방지)과 공사 품질저하 방지 등을 위한 절대공기 부족으로 부득이 준공기한을 연기코자 함.

아. 예산과목

○ 푸른도시국 자연생태과, 생태계복원, 및 보전과 야생동식물보호,

생태계보전사업, 근교산등산로정비, 시설비

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

주무관	오맹렬		조경과장	이성주		관리부장	代이경로		서울대공원장	08/08 안영노
협조자	주무관	김흔진		총무과장	이경로
시행	조경과-4330	(	2013.8.2.	)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원 조경과	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7993	/		/	대시민공개