문서번호	시설보수과-4347
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		박용선	11/14 송상영
협 조
	주무관			김호규
	주무관			이민호
	주무관			김희철

외부전문가 합동 자체정밀점검 완료보고

성내5교외 6개소 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

외부전문가 합동 자체정밀점검 완료보고

성내5교외 6개소 -

Ⅰ		점검개요

○ 대상시설물(7개소)

연번	시설명	종별	규 모		구조	설계 하중	노선명	준공 년도	시설물 담당	비 고
			폭(m)	연장(m)
1	성내5교	법정외	30	54	RCS	DB-24	거여동길	1984	이민호	총괄 : 정병윤
2	장지2교	법정외	20	15	RCS	DB-24	헌 릉 로	1986	이민호
3	서 부 교	법정외	25	22	RA	DB-24	거여동길	1987	이민호
4	세곡3교	법정외	35	40	PSC	DB-24	밤고개길	2008	정병윤
5	복정2교	법정외	53.5	25	RCS	DB-24	헌 릉 로	1994	김희철
6	방이고가	법정외	18.5	70.6	STB	DB-24	오 금 로	1985	정병윤
7	봉 은 교	1종	25	255	STB	DB-24	봉은사로	1999	김호규

○ 점검기간 : 2014. 8.25 ~ 10.27

○ 외무전문가 : 대신이엔지㈜ 하상우외 2인

Ⅱ		연차별 집행계획

(단위 : 백만원, 제경비 제외)

시설명	계		금년내 조치 (단순사항 및 단기중 시급을 요하는 사항)		2015년 조치 (단기 및 중기)		2016년 이후 (중기 및 장기)		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	84	263.7	2	-	31	23.6	51	240.1
성내5교	13	12.3			6	7.1	7	5.2
장지2교	3	2.6			2	1.9	1	0.7
서 부 교	10	69.3			2	0.1	8	69.2
세곡3교	7	48.7	1	-	2	0.1	4	48.6
복정2교	10	21.9	1	-	3	6.3	6	15.6
방이고가	11	101.3			5	5.0	6	96.3
봉 은 교	30	7.6			11	3.1	19	4.5

※ 세부내역은 붙임 지적사항 보수공사비 참조

Ⅲ		상태평가 결과

시설명	성내5교	장지2교	서부교	세곡3교	복정2교	방이고가	봉은교
등 급	B	B	B	B	B	B	B

Ⅳ		조치계획

○ 점검결과 주요 지적사항에 대하여 시설물 담당별로 도로관리시스템에 입력조치

○ 배수구 청소 등 단순사항이거나 시급을 요하는 지적사항에 대하여는 금년내 조치

○ 예산부족으로 정비가 곤란한 단기 및 중기에 대하여는 사안의 시급성에 따라 2015년도 예산편성에 반영

○ 주의관찰을 요하는 중기 및 장기에 대하여는 2016년 이후 검토

Ⅴ		점검비 지급

○ 지급대상 : 하상우외 2인(김성수, 이종명)

○ 지급금액 : 29,050,000원

○ 지급방법 : 개인별 계좌입금

○ 예산과목 : 도로시설관리,도로시설물운영,시설물안전점검및진단,시설비

붙 임  1. 지적사항 보수공사비 1부.

2. 성과품 5부(별도). 끝.