문서번호	물재생과-6266
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
홍민표		강병수	11/14 채희정
협조
	주무관		김근수

토목시설물 유지관리 예산 집행잔액 활용계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

중랑물재생센터

물재생과

토목시설물 유지관리 예산 집행잔액 활용계획 보고

우리 센터에서 시행중인 토목시설물 유지보수공사와 관련「물재생센터 맨홀류 안전점검결과 통보」<물재생시설과-14102(2014.11.5.)>에 의거 긴급조치 대상(4개소)외 센터내 정비가 필요한 노후 맨홀류에 대하여 전반적인 정비를 하고자 시설물유지관리(토목시설물)집행잔액을 활용 추가 시행하여 토목시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		공사개요

가. 공 사 명 : 토목시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 정석티엠에스(주) 대표 김영선

다. 총공사비 : 172,326천원(도급비 : 172,326천원, 관급비 :  - , 이전비 :  - )

사 업 명	예산 현액	계약금액(집행)	집행잔액	비고
토목시설물 유지리관리사업	200,000천원	172,326천원	27,674천원

라. 공사기간 : 2014. 05. 07 ～ 2014. 12. 31

2		보고내용

가. 2014. 10. 17. 분당 판교에서 발생한 환기구 덮개 사고와 관련 실시한 “물재생센터 맨홀류(그레이팅, 철판덮개, 맨홀등) 안전점검결과 통보”<물재생시설과-14102, (2014.11.5.)>에 따라 긴급조치 대상(4개소)외 센터내 안전사고 발생 우려가 있는 노후 맨홀류에 대한 자체 점검한 바,

나. 스틸그레이팅 및 철판덮개 등 안전시설이 미비한 배수로내 집수정(60여개소)과 노후한 맨홀(철판덮개 노후, 도장탈색 등)에 대하여 보행자 실족사고등 안전사고 발생 우려가 있기에 추가적인 정비가 필요한 실정임.

다. 추가 공사내역                                       (단위:천원)

공사내역	추가 작업물량	소요예산	비 고
맨홀류 정비	▸스틸그레이팅정비 64개소 ▸맨홀덮개 교체 2개소 ▸맨홀덮개 도장 125㎡	27,000	계약금액잔액 : 17,000 집행잔액활용 : 10,000 소 계 : 27,000

3		예산집행현황

(단위 : 천원)

연번	공사내역	작업물량	지출예산	비고
1	#2처리장 소화조5지 상부슬래브 정비외 4건	▸소호조상부슬래브정비 450㎡ ▸메쉬휀스설치70m ▸기타 소규모 정비	120,000	1차기성
2	보도블록 정비외 2건	▸소규모보도정비3개소 ▸탈기기동 도배수로 1개소 ▸반사경 설치 2개소	3,500	2차기성 지출예정
3	보강토옹벽 블록쌓기	▸A=117㎡	22,000	2차기성 지출예정
4	소규모 도로 포장외 기타	▸포장면적=1.4a ▸침투형 빗물받이 1개소 ▸기타 부대공 1식	9,500	2차기성 지출예정
소 계			155,000	▸계약금액 : 172,326 ▸잔 액 : 17,326

4		조치계획

가. 토목시설물 유지보수공사 추가공사에 소요되는 예산(10,000천원)은 집행 잔액을 활용 설계변경 시행코자함.

나. 추가공사 세부내역                                     (단위 : 천원)

사 업 명	계 약 금 액	집 행 잔 액	조 치 계 획	추가 활용금액
토목시설물 유지리관리사업	172,326	27,674	▸스틸그레이팅정비 64개소 ▸맨홀덮개 교체 2개소 ▸맨홀덮개 도장 125㎡	10,000

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.