문서번호	설비부-12816
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김경남	이달영	11/14 박기형

『송정.사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사』

준공(납품)기한 연기요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『송정.사근 빗물펌프장 증설 기계설비공사』

준공(납품)기한 연기요청 검토보고

『송정.사근 빗물펌프장 증설 공사』 관련 위탁감독기관인 시설관리공단으로부터 선행공정(토목.건축) 지연에 따른 기계공사 준공(납품)기한 연기요청에 대한 검토 보고임.

관련근거

❍ 준공(납품)기한 연기요청 : 시설관리공단 위탁감독

▶ 강북공사관리3처 - 11090(2014.11.13)

▶ 강북공사관리3처 - 11092(2014.11.13)

공사 및 관급자재 내역

(단위 : 원)

공사명 (품명)	계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약금액	납품기한
				금차	총차
송정.사근 빗물펌프장증설 기계설비공사(1차)	2013045297301	주신공영(주)	110,000,000	‘14.11.28	‘14.11.28
송정.사근 빗물펌프장증설 기계설비공사(2차)	2014030843200		124,218,148
입축사류펌프	12142200000	㈜신신기계	290,719,000
제진기	12132127700	사회복지법인대한장애인복지회	176,000,000	‘14.11.28
가동보	12131129800	㈜청수환경	209,675,500	‘14.11.28
버터플라이밸브	121313508300	㈜현대밸브	48,948,000	‘14.11.28
체크밸브	121313508400		87,280,000
신축관이음	121313502200		18,216,000

감리단 의견

❍ 연기사유 : 선행공정(토목 및 건축) 지연에 따른 기계공사 준공(납품)기한 연기

❍ 준공(납품)기한 연기 내용

계약건명	당초		변경		비 고
	금차	총차	금차	총차
송정.사근 빗물펌프장증설 기계설비공사(1차)	‘14.11.28	‘14.11.28	‘15.01.30	‘15.01.30	도급공사
송정.사근 빗물펌프장증설 기계설비공사(2차)
입축사류펌프					총액계약
가동보	‘14.11.28		‘15.01.30		총액계약
제진기	‘14.11.28		‘15.01.30		총액계약
버터플라이밸브	‘14.11.28		‘15.01.30		3자단가
체크밸브
신축관이음

❍ 지체지상급 부과여부 : 미부과

검토의견

❍ 시설공단(위탁감독)이 제출한 기계공사 준공(납품)기한 연기 실정보고에 대한 검토결과 선행 공정(토목 및 건축) 지연으로 기계공사 준공(납품)기한 연기가 타당하므로 원활한 공사추진을 위해 건설총괄부로 계약변경 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 준공(납품)기한 연기요청 공문 각 1부.   끝.