다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	「시 소유 석면건축물 위해성 평가」용역 변경계약 의뢰

1. 기후대기과-19989(‘14.11.13)호와 관련입니다.

2. 현재 진행중인 「시소유 석면건축물 위해성 평가」용역의 과업대상, 과업기간, 용역비 변경에 따라 용역업체와 아래와 같이 변경계약 체결을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

○ 건    명 : 시소유 석면건축물 위해성 평가 용역

○ 계약업체 : ㈜한국보건환경연구소(대표자:박경자외1)

○ 계약기간 : 2014.06.10. ~ 2014.12.31.

○ 계약금액 : 37,020,480원 (금삼천칠백이만사백팔십원)

나. 변경내용

구분	당초	변경	변경사유
과업대상	550개소	935개소	증가된 과업대상 건축물은 법적인 석면건축물은 아니나 건축물 내에 석면이 함유되어 있어, 공공건축물을 이용하는 시민과 직원들에게 석면에 대한 위해성이 우려되어 추가 위해성 평가 실시 필요
계약기간	2014.6.10. ~ 2014.12.31	2014.6.10. ~ 2015.2.20
계약금액	37,020,480원	54,763,480원

붙임 : 1. 시소유 석면건축물 위해성평가 변경 계약 방침서 1부.

2. 변경 과업지시서 1부.

3. 추가 대상 산출내역서 1부.

4. 추가 위해성평가 대상 1부.

5. 합의각서 1부. 끝.

	기후대기과장
주무관	강지선		대기관리팀장	윤준성		기후대기과장	11/14 최영수
협조자
시행	기후대기과-20130	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)	/
전화	2133-3628	/전송	2133-1022	/	kangjs1230@seoul.go.kr	/	부분공개(6)