투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「서울대공원 남미관 보수공사 폐기물처리 용역」용역기간 연기의뢰

1. 시설과-6985(2014.11.14.)호 및 ㈜벽성 2014-11-03(2014. 11. 14)호와 관련입니다.

2.『서울대공원 남미관 보수공사 폐기물처리 용역』과 관련하여 용역기간 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 용 역 명 : 서울대공원 남미관 보수공사 폐기물처리 용역

나. 계 약 자 : ㈜벽성그린산업 대표 황 윤 남

다. 계약금액 : 일금오백구십일만삼천원정(\5,913,000원)

라. 변경내용

구 분	변 경 내 용		비 고
	당 초	변 경
용역기간	‘14.09.29 ~‘14.11.30	‘14.09.29 ~‘14.12.10	10일간

마. 연기사유

-  건축공사 준공기한 연기에 따른 폐기물처리 용역기간 연기

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종 보존, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비(401-01)

첨부 : 방침서 1부.  끝.

	시설과장
★주무관	이강호		주무관	이상국		시설과장	11/14 공헌구
협조자
시행	시설과-7010	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개