문서번호	재생지원과-11812
결재일자	2013.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	실태조사사업팀장	재생지원과장		주거재생정책관
허동	代허동	배경섭		08/14 진희선
협 조	재생지원계획팀장		임인구
	실태조사관리팀장		하대근

실태조사용역 주간공정 회의결과 보고 (28차)

2013. 8.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

실태조사용역 주간공정 회의결과 보고(28차)

우리시에서 시행중인 정비예정구역 실태조사 용역에 대한 주간공정회의(28차)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		회의 개요

목    적 : 실태조사 용역 주간공정 보고

일    시 : 2013. 8. 13(화) 10:00∼11:30

장    소 : 신청사 3층 공용회의실

참 석 자 : 16명

○ 내 부 : 권역별 담당자 8명

○ 외 부 : 권역별 책임 및 분야별 기술자 8명

회의안건

○ 실태조사 용역 공정현황 확인

○ 용역 보고서(성과품) 작성방법 검토

○ 기타 현안사항 논의

Ⅱ		회의 결과

대  상 : 65구역【90구역 중 25구역 제외(해제 19건, 해제    추진 5건, 조사중단1)】

공정현황 : 부 진

권 역 명	공 정 율			비 고
	계획	실시	대 비
계	97.3%	96.1%	98.8%	부 진
북 측 1권역	96.9%	96.9%	100.0%	정 상
북 측 2권역	98.0%	99.0%	101.0%	양 호
동남측 1권역	93.0%	93.4%	100.5%	양 호
동남측 2권역	99.8%	99.8%	100.0%	정 상
서남측 1권역	99.4%	99.4%	100.0%	정 상
서남측 2권역	98.8%	98.8%	100.0%	정 상
뉴타운 1권역	98.7%	97.1%	98.7%	부 진
뉴타운 2권역	94.0%	84.5%	89.9%	부 진

진행내용

○ 재개발·재건축 : 실태조사결과 보고서(성과품) 작성

○ 도시환경사업 : 사업성 분석자료 보완, 서울연구원 검수자료 작성

※ 부진사유 : 도시환경정비사업 가이드라인 변경에 따른 지연

기타사항(지시사항)

○ 보고서 작성시 상위 및 관련계획 검토는 관련계획이 있는 경우만    기재 할 것

○ 사업추진 찬반 주민갈등정도 조사시 주민동의율, 면적 등 세부내용은 구청에 확인해서 기재 할 것

○ 용역사 별로 시행중인 정비예정구역 중 1개구역을 선정하여 보고서(샘플)를 작성 2013.8.19(월)까지 재생지원과로 제출 할 것

따로붙임 1) 공정회의 자료 1부.

2) 사진대지 1부.

3) 참석자 명부 1부. 끝.