문서번호	정보자원운영과-3106
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
박종순		김영숙	11/14 이계헌
협 조
	주무관			김희경
	주무관			조수정

-2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템 보강사업-

세외수입 DR장비 교체 설치계획

2014. 11.

데이터센터

[정보자원운영과]

- 2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강사업 -

세외수입 DR장비 교체 설치계획

「2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강」사업관련 세외수입 운영 장비를 재구성하여 여분의 서버 등을 활용, 세외수입 DR 노후장비를 교체함으로써 재난 재해 대비에 만전을 기하고자 함.

1	작업근거

□『2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강사업』 장비설치 계획(정보자원운영과-2243, 2014.9.5.)

2	작업 개요

□ 재난복구(DR) 서버 구성 현황

순번	업무명	변경전					변경후					비고
		모델명	주요규격				모델명	하드웨어 주요 규격(증설)
			CPU	메모리	디스크	I/O장치		CPU	메모리	디스크	I/O장치
1	DR 세외수입 AP서버	HP Superdome	1Ghz 8core	12 GB	146GB 2장	HBA 2장 NIC 2장	HP Superdome2	3.72 GHz 4core	64 GB	300GB 4장 300GB 2장 (Ignite서버)	HBA 2장 NIC 2장	세무 서버 파티션 증설
2	DR 세외수입 DB서버	IBM p595	1.9 GHz 8core	28 GB	146GB 2장	HBA 2장 NIC 2장	IBM Power780	2.53 GHz 4core	40 GB	300GB 4장	HBA 3장 NIC 2장 IO Drawer	세무 서버 파티션 증설
3	DR 스토리지	EMC DMX 3000			6.5 TB		EMC VMAX20K	-	-	총용량 14TB 600GB 32장 (Data Disk) 600GB 4장 (Hot Spare)	-

※ 세무종합 DR서버에 부품을 증설하여 세외수입 DR를 구축

□ 작업일정 : 2014. 11. 13(목) ~ 11. 28(금)

□ 작업장소 : 운영센터(데이터센터), DR센터(서소문별관 3동 지하전산실)

□ 작업대상 : 총 7식

○ 데이터센터(운영서버 내부복제구성) : 4식

- 운영 DB서버(IBM p780) 2식, 복제백업서버(IBM p780) 1식,  스토리지(EMC VMAX 20K) 1식

○ DR센터(원격지 재난재해대비용 복제 구성) : 3식

- DR AP서버(HP Superdome2) 1식, DR DB서버(IBM Power780) 1식, DR 스토리지(EMC VMAX 20K) 1식

□ 작업인력 : 13명

○ 데이터센터 : 2명(박종순, 임연주)

○ 사업자(쌍용정보통신) : 3명(장재호 부장, 김남규 차장, 정재용 대리)

○ 제조사 및 협력업체  : 8명

- HP(한대수 팀장, 문정한 대리), IBM(정영삼 과장, 김태현 대리, 최영균 대리),  EMC(최경선 과장, 이준재 부장, 김상훈 차장)

□ 작업내용

○ DR센터 장비 입고 : AP서버(HP), DB서버(IBM), 스토리지(EMC)

○ H/W 물리적인 구성 : DR센터 DB서버(IBM), 스토리지(EMC)

○ 스토리지(EMC) 내부복제 및 DR센터 간 원격지복제 구성

○ H/W 물리적인 구성 : DR센터 AP서버(HP), 스토리지(EMC)

○ DR센터 서버 원격지 복제볼륨 구성작업

3	추진일정

□ 사전준비 (DR센터 환경실사) : 2014. 11. 10(월)

□ DR센터 IBM, HP, EMC 장비 입고 및 구성 : 2014. 11. 13(목)

○ 세외수입 DR장비 입고장비 : 파티션 추가에 필요한 부품

- IBM서버 부품(신규 입고) : I/O Drawer 1EA, 메모리 64GB, 디스크 300GB 4장, 네트워크연결카드(NIC) 2장, 디스크연결카드(HBA) 3장

※ IBM 서버는 운영센터 예비서버 1개 파티션 유지, 신규 부품 입고

- HP서버 부품(기존 예비서버 부품 데이터센터에서 반출) : 메모리 32GB, 디스크 300GB 6장(OS 백업용 2장 포함),  네트워크연결카드 2장, 디스크연결카드(HBA) 1장

※ HP 서버 메모리 32GB는 11.25일 반입예정

- EMC 스토리지 : 디스크 600GB 36장

❍ DR센터 장비 입고 및 설치 구성

구분	전체 작업내용	비고
IBM 서버	I/O Drawer 물리적 증설 CPU 활성화(Activation) 메모리 물리적 증설 서버 – DATA SAN Switch 간 2라인 포설 서버 – L2 Switch 간 4라인 포설(Public 2, Interconnect 2) O/S 설치
HP 서버	CPU 활성화(ICAP 제거) 메모리 물리적 증설 서버 – DATA SAN Switch 간 2라인 포설 서버 – L2 Switch 간 4라인 포설(Public 2, Interconnect 2) O/S 설치
EMC	Health Check 600GB Disk 38EA 물리적 증설 디스크 인식 작업 증설된 Disk의 Formating 작업 스토리지 – DATA SAN Switch 간 4라인 포설(기완료) 스토리지 – DWDM SAN Switch 간 SRDF용 4라인 포설 DWDM SRDF LinkUp 작업

□ DR센터 HP 장비 입고 및 구성 : 2014. 11. 25(화)

구 분		2014년 11월															비고
		10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	DR 환경실사
2	DR장비입고 및 구성 (IBM,EMC)
3	DR장비입고 및 구성 (HP)
4	원격지/내부 복제 구성 (EMC)																11.25(화)후 추가작업 수행

※ 원격지 복제 서버의 디스크 구성 작업은 11.25(화)일 이후 실시

□ 시간별 작업계획(11.13(목))

작업일시		작업부서	작업내용	비고
D R 센 터	10:00 ~ 10:30	IBM, HP	운영센터 장비 반출(I/O Drawer, memory)
	10:30 ~ 12:00	IBM, HP	DR센터로 장비 이동
	13:00 ~ 14:00	IBM	기존 DR세무시스템(AP) 백업
	14:00 ~ 14:30	IBM	시스템 Shutdown 라인포설(UTP 4라인, 광케이블 2라인)
	14:00 ~ 15:00	EMC	Disk 입고(600GB × 36EA) 라인포설(광케이블 4라인) - 원격지복제(SRDF)용
	14:30 ~ 16:30	IBM	하드웨어 장착(IO Drawer, CPU Activation, I/O카드, Disk)
	15:00 ~ 15:30	EMC	스토리지(VMAX20K) 상태 점검(Health Check)
	15:30 ~ 18:30	EMC	Disk 증설 작업 - RAID5(7D+1P) - Hyper Size 분할 및 BinFile 환경 설정 - Hot Spare Disk 4EA 구성
	16:30 ~ 17:00	IBM	DR 세외수입DB서버 파티션 생성
	17:00 ~ 18:00	IBM	DR 세외수입DB서버 O/S 설치
	18:30 ~ 19:30	EMC	원격지 복제전용망(DWDM) SRDF LinkUp 작업	기존 port 재활용
운영센터	10:00 ~ 12:00	EMC	사전 디스크구성정보파일(BinFile) 구성 및 환경파일 적용
	14:00 ~ 21:00	EMC	세외운영DB서버 내부복제(BCV) 구성 작업 세외운영서버(ap,db) 원격지 복제(DR) 구성

4	행정사항

□ 기존 운영중인 세외수입 원격지 복제 중단(11.13~12.21) : 세무과 협조

❍ 원격지복제전용망(DWDM망)의 재활용으로 인하여 현 세외수입종합징수시스템의 복제 중단후 신규 시스템 구성

□ 세무종합 DR서버 작업기간중 일시 중단(11.13) : 세무과 협조

❍ 세외수입종합징수시스템 DR서버가 세무종합 DR서버에 부품 증설되므로 작업기간중 일시 중단

5	향후 계획

□ ’14.11.13.~12.21 : 세외수입종합징수시스템 원격지 복제 중단

□ ’14.11.28.~12.31 : 세외수입종합징수시스템 재난복구 시나리오 작성 및 테스트

□ ’14.12.22.          : 세외수입종합징수시스템  서비스 오픈

□ ’15.1월 중          : 재해복구 모의훈련 실시