문서번호	토목부-22474
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	11/14 노우성

- 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 -

보행자용 방호울타리 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 -

보행자용 방호울타리 설치 검토보고

개봉두산아파트 ~ 개봉역 구간 등은 보행자 및 자전거 이용자가 많아 안전사고가 발생될 우려가 있어 보도측에 안전사고 예방을 위해 보행자용 방호울타리 설치를 위한 검토 보고임.

근 거

○ 보도구간 난간 설치요청 민원(개봉두산아파트2014-3호 2014.1.15)

○ 개봉두산아파트 ~ 개봉역구간 보행자 방호울타리 설치요청 민원이첩

(구로구 교통행정과-14075호 2014.4.28)

○ 북측도로 보행자 방호울타리 설치 검토지시 (SMIH-14-24549호 2014.4.28)

○ 투융자 심사완료(건설총괄부-19019호,2014.10.15.)

공사개요

○ 위    치 : 구로구 개봉동 234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 사업규모 : 지하차도 설치 폭4차로, 연장736m

- 남·북측 측도설치 : 폭2~3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 58,597백만원

○ 시 공 사 : ㈜케이에쓰시건설외 1사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

현 황

○ 남부순환로 북측도로(개봉두산아파트 ~ 개봉역 구간) 보도는 보행자 및 자전거 이용자가 많아 안전사고가 우려되어 안전사고 예방을 위하여 보행자 방호울타리 설치 요청 민원이 지속적으로 제기된 구간임.(개봉 두산아파트입주자 대표, 구로구청 이첩 민원 등)

○ 민원내용

민원내용	민원인	현 설계	비고
개봉역 ~ 삼환,개봉두산아파트 방면 도보 이용시 어린이 동반시 인사사고 발생 우려가 높은 실정으로 보행자 방호울타리등 안전시설물 설치를 요청함.	- 개봉두산아파트 입주자대표회장 - 김○○(개인) 010-8707-****	북측도로 보행자 방호울타리 계획 없음

○ 기존에 설치되어 있는 보행자용 방호울타리 현황

구분	형식	기 설치 구간 및 연장	현상태	비고
보행자용 방호울타리 (보도난간)	STS 난간	삼호아파트앞 120m	중(하)

보고내용

○ 삼호 아파트구간은 버스가 정류장 도착시 버스승객의 안전한 탑승과 보호 위하여 방호울타리가 설치되어 있으나, 일부만 재활용이 가능할 정도(상태 : 중(하))이므로 신규 설치가 필요함.

방호울타리 : 보행자용 방호울타리는 보행자,자전거 등이 길 밖으로 추락하는 것을 방지하기 위해 설치하거나 보행자의 무단도로 횡단을 방지하기 위하여 설치하는 안전시설물

○ 개봉 두산아파트~ 삼환아파트 구간은 보행자와 자전거 이용자의 이용이 빈번한 구간으로 안전사고 우려되어 민원이 지속적으로 제기된 지역으로 방호울타리 설치가 필요함.

공사비 증·감 내역

○ 설치계획 수량

공 종	규 격	시공구간	단위	수량	비고
보행자용 방호울타리	- 서울시 우수공공디자인 인증제품 - AL (W)2000 X (H)1000	두산후문 ~ 개봉역앞 (림괄아파트)	m	568
보행자용 방호울타리	- 기존 STS난간 자재유용 - STS(W)2000X(H)900	연결로 곡선부 사면측	m	30
보도용 방호울타리	- SB2등급(차량충돌시험 합격제품) - 철재 아연도금 (H)900x(B)320x(W)3000	연결로 곡선부 (개봉철도고가교하부)	m	80
계				678

○ 공사비 증·감

공 종	규 격	단위	수량	공사비	비고
- 보행자용 방호울타리	AL 디자인형울타리 W2000× H1000	m	568	71,458,944
- 보행자용 방호울타리	사면부(기존난간유용) STS H950	m	30	419,850
- 보도용 방호울타리	SB2급(노측용 개방형)	경간	27	5,695,272	L=80m
- 보도용 방호울타리 POST 설치(추가)	Φ139.8x2200x4.5T (C.T.C:1.5m)	본	27	1,849,041
직접공사비				79,423,107
제경비				9,816,893
공급가액				89,240,000
부가가치세				8,924,000
도급공사비				98,164,000

감리단 검토의견

○ 개봉역 ~ 개봉두산아파트 구간 보행자용 방호울타리 설치를 요청하는 구로구 이첩민원(김○○님) 및 개봉두산아파트 민원을 검토한 결과 아래와 같은 시설 필요

- 두산, 삼환, 삼호아파트 1,713가구 주민 보행안전은 물론 개봉역 주변 및 개봉철도고가교 하부 보행자 교통사고 방지를 위하여

- 연결로 시점부 ~ 두산아파트 기관실까지 보도구간에 보도용 방호울타리 L=80m 설치

- 보도좌측 사면구간에 기존난간을 유용한 보행자용 방호울타리 L=30m 설치

- 두산아파트 기관실 ~ 개봉역(림괄아파트) L=568m 구간 보행자용 방호울타리 설치

○ 증액되는 공사비 98,164천원에 대하여는 본부 승인 후 설계변경자문회의(소위원회) 의견에 따라 추후 설계변경에 반영하고자 함.

○ 북측도로 보행자용 및 보도용 방호울타리 설치계획 검토

구분	1안 (기 설치 난간유용)	2안 (신규자재 설치)	비고
설치계획	▷ 북측측도 : STA 0+00 ~ STA 0+780 [L=780m] ▷ 난간 설치계획 : L=678m [ 횡단보도 및 가각부 제외] - 보행자용 방호울타리 : L=568m (두산아파트~개봉역) - 보도용 방호울타리 : L=80m (시점부 연결로 곡선구간) - 기존난간 유용 : L=30m (시점부 연결로 곡선구간)
개요	- 삼호아파트앞 기 설치분 120m유용 - 잔여구간558m 기 설치분과 동일 타입으로 설치	- 신규자재로 보행자용(L=568m) 및 보도용(L=80m) 방호울타리 설치 - 시점부 기 설치난간 자재 일부 유용(L=30m)
특징	- 자재유용으로 공사비 절감 - 기설치분 난간패턴 구형 및 중고자재로 미관 보통 - 서울시 디자인심의 필요	- 신규 설치로 공사비 증가 - 서울우수공공디자인(SGPD)인증 제품 사용으로 미관 양호 - 서울시 디자인심의 불필요
건의안		◎

조치계획

○ 남부순환로 북측도로(개봉두산아파트 ~ 개봉역 구간) 보행자 방호울타리 설치에 대한 실정보고 사항에 대하여 감리단의견과 같이 승인하고자 하며, 추가되는 공사비에 대하여는 추후 설계변경소위원회 심의결과에 따라 설계변경에 반영 하고자 함.

- 추가 공사비 98,164천원

붙 임 : 1. 감리 검토의견서 1부.  끝.