함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(우장산가압장 수전전압변경 전기공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『우장산가압장 수전전압변경 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 건    명 : 우장산가압장 수전전압변경 전기공사

나. 계 약 자 : 강일전력개발(주) 한광희

다. 계약기간 : 2014. 7. 21 ~ 11. 15

라. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비)

마. 설계변경 사유 : 계약물량 증감 및 신공정발생

바. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	83,581,860	87,659,000	증) 4,077,140	증) 4.88%

붙임 1. 설계변경 보고서 및 설계서 각 1부.

2. 설계변경 심의 결과서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	배형진		기전팀장	문용욱		시설관리과장	이자원		강서수도사업소장	11/13 이상래
협조자	주무관	김유진		행정관리팀장	김경식
시행	시설관리과-23924	(		)	접수		(		)
우	158-076	서울 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4023	/전송	3146-4039	/		/	대시민공개