투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재(아스팔트콘크리트) 수량변경 요청_ 2014년 노후포장도로 정비공사 B구역 관급자재구매

우리사업소에서 시행중인 「2014년 노후포장도로 정비공사(B구역)」에 사용되는 관급자재(아스팔트콘크리트)에 대하여 아래와 같이 물량변경을 요청하오니

조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 아스팔트콘크리트(2014년 노후포장도로 정비공사B구역)관급자재 구매-남부

나. 계약기간 : 2014. 5. 15 ~ 2015. 2. 28.

다. 계 약 자 : (주)드림아스콘  대표 서정윤

라. 변경내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
수량 (톤)	일반	9,979	13,176	증 3,197
	개질	407	911	증 504
구 매 액(원)		819,400,000	1,117,842,270	증 298,442,270

마. 변경사유 : 하반기 추가공사 시행에 따른 관급자재 물량 증가

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 변경내역서(1차) 1부.

2. 물량변경 사유서 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	조경현		도로보수과장	11/15 김승태
협조자	주무관	정규용
시행	도로보수과-6282	(		)	접수		(		)
우	150-073	서울 영등포구 대림3동 도림로 145	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5451	/전송	842-1634	/		/	대시민공개