투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설경전철(주) 대표이사 귀하
(경유)
제목	도로점용(굴착·복구)허가 승인 변경처리 알림

1.강북구 도시관리과-15809호(2014.9.30.), 우이(공사)제2014-757호

(2014.09.04)와 관련입니다.

2. [우이-신설 경전철 민간투자사업 건설공사(2공구)]와 관련하여 도로 점용(굴착·복구)허가 승인 신청건에 대하여 강북구청(도로관리과)로부터 당초 허가조건을 철저히 이행하는 조건으로 변경 허가 처리하였기에 알려리니 관련업무에 철저를  기하여 주시기 바랍니다.

가. 도로점용(굴착·복구) 허가 변경처리 내용

연번	신청인	점용 장소	당초			변경		비고 (시공사)
			허가번호	면적(㎡)	기간	면적(㎡)	기간
1	서울특별시 도시기반 시설본부	수유동 338-46 번지 일대	도로과-8946(‘09.09.10)	1,400	2009.09.10~ 2014.08.31	33,883.6	2009.09.16~ 2016.11.30 (27개월연장)	우이- 신설2공구 두산건설(주)
			도로과-1323 (‘10.02.04)	5,164	2010.02.05~ 2014.09.14
			도로과-3393 (‘10.03.31)	19,325	2010.04.01~ 2014.09.14
			도로과-7162 (‘10.07.07)	8,036	2010.07.07~ 2014.06.30

붙   임 : 1. 도로점용(굴착·복구) 허가 변경처리 공문 1부.

2. 변경승인서 및 승인 조건 각 1부 .끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안창호		경전철2과장	이승우		도시철도사업부장	10/01 한동근
협조자	주무관	임병관
시행	도시철도사업부-6175	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 시청남산별관 3층	/
전화	02-772-7189	/전송	02-772-7135	/	changho@seoul.go.kr	/	대시민공개