문서번호	시설관리과-23898
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
유준영	문용욱	이자원	11/13 이상래

『우장산가압장 배관교체 공사』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2014. 11

강서수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『우장산가압장 배관교체 공사』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

『우장산가압장 배관교체 공사』에 대한 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

심의대상

공 사 명	우장산가압장 배관교체 공사
공 사 기 간	2014. 7. 11 ~ 11. 15
계 약 금 액	75,831,550원
시 공 회 사	씨에이엔지니어링(주)
대 표 자	지 용 섭

심의일시 : 2014. 11. 13(목) 11:00(장소 : 4층 회의실)

설계변경 현황

공사명 : 우장산가압장 배관교체 공사

공사비 변경 개요

구 분		공 사 금 액(원)			증감율
		당 초	변 경	증ㆍ감
총공사비		104,972,550	98,895,000	감)6,077,550	감)5.79%
도급비	공사원가	68,937,773	63,412,728	감)5,525,045	감)8.01%
	부가가치세	6,893,777	6,341,272	감)552,505	감)8.01%
	합 계	75,831,550	69,754,000	감)6,077,550	감)8.01%
관급자재비		29,141,000	29,141,000	0	0.00%

공사 개요

- 모터펌프 흡입, 토출배관 철거 및 제작설치 1식

- 수충격방지배관, 소화배관 교체 1식

- 밸브류, 밸브액츄에이터, 호이스트(3톤) 교체 1식

주요 설계변경 사유

- 펌프 흡입측 신축관 미설치에 따른 물량 감소

- 수충격방지 배관 위치 변경에 따른 물량 증ㆍ감 및 신규비목 발생

- 폴리텍대학 및 고지대 임시급수용 바이패스배관 설치 물량 제외

- 보험료 정산 등

심의내용

설계변경의 타당성

물량 증 ․ 감적용 적정여부(공종별 계약단가 적용)

제경비 적정 산정 및 적용 적정성

계약금액 조정(설계변경) 등

심의결과

계약변경 : 타당

주요 공종 변경사항 : 타당

세부공종 조정내역 : 타당

제경비 적용 : 타당

조치 의견

심사결과에 따라 설계변경 내역과 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 1. 설계변경 심의결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.