투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	사토 임의반출에 따른 조치 알림

1. 고덕감리2014-520(2014.11.13)호와 관련입니다.

2. 공사장에서 발생된 사토의 처리는 계약된 장소 또는 발주처의 승인을 득한 장소로 반출하여야 함에도

3. 구리암사대교 연결도로 건설공사의 일부 사토를 실정보고 승인 없이 주변 골재장으로 임의 반출한 수량만큼 운반비를 감액하여 주시기 바랍니다.

4. 2014.11.21. 용마터널~구리암사대교 연결도로간 도로개통을 위하여 노력한점을 들어 금회에 한하여 『엄중경고(책임감리원, 현장대리인)』조치하니 향후 이러한 사례가 재발되지 않토록 유의하여 주시고

5. 재발시에는 벌점부과 등을 조치 할 예정임 알려 드리오니 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	구리암사대교 연결도로 건설공사 책임감리원 우재경귀하,구리암사대교 연결도로 건설공사 현장대리인 오재섭귀하
주무관	박상철		광역도로과장	최광무		토목부장	11/17 노우성
협조자
시행	토목부-22524	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개