문서번호	계측관리과-3697
결재일자	2013.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	계측관리과장	요금관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
백선호	황오주	이민승	김준기		08/20 정연찬
협 조

동파예방사업 추진

2013. 8.

상수도사업본부

요금관리부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

동파예방사업 추진

겨울철 한파 대비 사전예방 위주의 지역별 ․ 주택유형별 맞춤형 동파예방 대책을 마련하여 겨울철 시민생활 안정 도모

1		사업개요

□ 추진목표

○ 동파발생 최소화(전년대비 50% 감소 추진)

년도별	'12년	⇒	'13년	⇒	'14년
동파건수	12,335건		6,000건		3,000건

○ '12년도 발생 동결 수도관 완전정비 : 733건

□ 추진기간 : 2013. 2 ～ 2014. 3. 15

※ 겨울철 한파상황실 운영 : '13.11.15 ～ '14.3.15

□ 추진방향

○ 동파 개연성이 높은 취약세대를 선정하여 완전정비

○ 동파방지계량기 및 보온덮개 성능을 개선하여 동파발생 최소화

○ 공동주택 계량기함 설비기준을 구체화하여 건축허가 및 급수승인 시 적용

○ '12년 동결된 수도관 겨울철 이전 완전정비

2		추진실적

□ 사업별 추진현황 - 완료 2, 추진중 5

사 업 명	추 진 현 황	비 고
동파취약세대 조사 및 선정	•취약세대 선정 : 78천세대(4.12)	완료
동파방지계량기 성능시험	•15㎜ 성능시험 완료 : 1차(3. 26), 2차(5. 23) •20㎜ 성능시험 중	추진중
동파방지계량기 설치	•설치현황(8.16일 현재) - 추진실적 (15.8%): 12,329개	추진중
보온덮개 개선 및 성능시험	•개선 보온덮개 성능 시험 완료(5.10) •시안제작(8.8) : 디자인 검토 중	추진중
계량기함 설비기준 구체화	•구청 건축허가 시 설비기준 5.21부터 적용 중	완료
맨홀식계량기 보호통(보온재) 정비	•보호통 전수조사 및 성능시험 완료 •정비계획수립 : 대상 17,200개 소요예산5억원	추진중
동결관 정비	•정비실적 : 97%(대상 733건, 정비 709건)	추진중

□ 동파방지계량기 설치 및 준비사항

○ 동파예방 사전조치를 위한 동파취약세대 조사 및 선정 : 78천세대(4.12)

- 복도식아파트 55,130, 연립주택 10,860, 단독주택 4,930, 소규모 상가 등 7,230

○ 동파방지계량기 성능시험 : 동파내한(상수도연구원) 및 내구성(수도자재관리센터)

- 15㎜ 성능시험 완료 : 1차 시험(3. 26), 2차 시험(5. 23)

․ 9개 업체(시료 27개) 중 2개 업체 적합

- 20㎜ 성능시험 중(서울시 최초 도입) : '13. 6 ～ 8

○ 동파방지계량기 구매 및 설치

- 구매현황 : 업체 생산능력 감안 물량 및 납품일 지정

계(납품일)	1차(7.15)	2차(8.8)	3차(8.30)	4~6차(9월중)
78,150개	6,705	16,000	28,500	26,945

- 설치현황(8.16일 현재) : 12,329개, 추진실적 15.8%

□ 보온덮개 개선(기존 1중 구조 → 개선 2중 구조) 및 성능시험

○ 복도식아파트 등 취약지역의 계량기함에 외기차단 덮개 부착 추진 : 34만매

○ 성능시험(5.10) : 현장 및 실험실 성능시험(상수도연구원)

○ 시안제작(8.8) : 디자인 선정(별첨 3개의 시안 중 제1안 선정)

- 문양(음용률 향상을 위한 디자인), 문구(계량기 동파방지 요령)

○ 보온덮개 제작 및 설치 : 8. 15 ～ 11. 20

□ 계량기함 설치기준 구체화 및 보호통(보온재) 정비

○ 벽체식계량기 보호함 설치 강화된 기준 적용 : 5 .21부터

- 현재 구청에서 건축허가 시 세부설치기준 적용 중

○ 맨홀식계량기 보호통(보온재) 정비

- 보호통(보온재) 전수조사 : 5. 10

- 정비대상('13년) : 17,200개(소요예산 5억원)

- 시제품 성능시험 완료(상수도연구원) : 1차(6. 28 ～ 7. 3), 2차(7. 25 ～ 8. 2)

- 정비계획 수립 및 정비 완료: '13. 8 ～ 10

□ 동결수도관 정비

○ 산기슭, 암반지대 등 심도가 부족하여 동결된 수도관 정비

○ 정비실적(8.16일 현재) : 대상 733건, 정비완료 709건(97%)

□ 사업소별 추진현황

사 업 명		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
동파방지 계량기 설치	대 상	78,150	8,530	9,640	8,190	23,200	9,150	4,640	7,810	6,990
	설 치	12,329	1,346	1,552	1,706	4,061	1,396	419	626	1,223
	설치율(%)	15.8%	15.8%	16.1	20.8%	17.5%	15.3%	9.0%	8.0%	17.5%
맨홀식계량기 보호통(보온재) 정비	대 상	17,200	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
	정 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	추진율(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동결관 정비	대 상	733	475	134	54	10	1	54	-	5
	정 비	709	451	134	54	10	1	54	-	5
	추진율(%)	97%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%

3		향후계획

□ 겨울철 동파․동결예방대책 완료 : 11. 15까지

□ 겨울철 준비 사전점검 T/F팀 운영 : 10. 15 ～ 11. 15

□ 동파예방 시민홍보 추진 : 11월 ～ 12월

별첨		보온덮개 디자인 시안