문서번호	교량보수과-3519
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
이기승		박춘배	11/17 정진오
협 조
	주무관			김형섭

송정교 외 2개소 정밀점검 용역 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  11

성동도로사업소

(교 량 보 수 과)

송정교 외 2개소 정밀점검 용역 결과 보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의거 시행중인 “송정교 외 2개소 정밀점검용역”과 관련 용역이 준공되어 그 결과를 보고함.

□ 용역개요

○ 시설물명 : 송정교, 성수대교북단지하차도, 천호대교 U턴 차로교

시 설 명	위 치	규 모	준공 년도	비고
송정교	성동구 송정동	폭(B)=14.2m 연장(L)=386.0m	1992.11
성수대교북단지하차도	성동구 성수동1가	지하차도 폭(B)=7.0m, 연장(L)=176.0m 옹벽 폭(B)=3.8m, 연장(L)=208.0m	1994.03
천호대교북단 U턴차로교	광진구 광장동	폭(B) = 35.1m 연장(L)= 44.0m	2003.12

○ 계약내역

- 용역기간 : 2014.05.19. ~ 2014.11.14. (180일간)

- 도 급 액 : 사천오백구십사만팔천육백오십원정(￦45,948,650-)

- 도 급 사 : 대한민국상이군경회

- 사업책임기술자 : 황인선 부장

□ 추진경위

○ 2014. 5. 13 : 계약체결

○ 2014. 6. 12 : 착수보고회 실시

○ 2014. 7. 25 : 용역사 사업책임기술자 등 참여기술자 간담회 실시

○ 2014. 10. 13 : 용역사, 발주처 합동점검 실시

○ 2014. 10. 20 : 최종보고 및 외부전문가 자문 실시

○ 2014. 11. 14 : 준공계 제출

□ 용역결과 주요 내용

시설명	상태평가 (결함도점수)	보수보강비 (천원)	주요 결함내용	비고
송정교	B (0.251)	소계 19,930	∘ 교면포장 아스콘 균열 12.7m, 균열군 2.0㎡, 패임 4.5㎡, 소성변형 52.05㎡ ∘ 방호울타리/연석 방호울타리 파손 3EA, 연석 파손 0.04㎡ ∘ 신축이음 본체파손 0.6㎡, 이격 2.2m, 유간 토사퇴적 135.0m, 후타재 균열 143.5m, 마모, 파손 132.4㎡ ∘ 슬래브 균열(0.2mm이하) 184.91m, 균열(0.3mm이상) 5.2m, 균열군, 백태 52.26㎡, 재료분리, 파손, 박락, 보수부박리 15.8㎡, 철근노출 1.78㎡ ∘ 하부구조 박리 0.26㎡, 보수부 균열군 60.0㎡, 철근노출 1.03㎡, 침식 104.35㎡ ∘ 기타 부대시설 물끊기(노치)탈락 2.0m, 차선규제봉 탈락 3EA
		개략공사비 6,409
		하자보수물량 13,521
천호대교 북단 U턴차로교	B (0.225)	소계 82,728	∘ 교면포장 아스콘 포장열화 1540㎡, 패임 0.84㎡, 포트홀 0.04㎡ ∘ 방호벽/중분대 균열(0.2mm이하) 10.5m, 표면열화 7.0㎡, 박락 0.46㎡, 철근노출 2.82㎡ ∘ 바닥판하면 균열(0.2mm이하) 58.8m, 균열군 2.0㎡ ∘ 거더/가로보 균열(0.2mm이하) 2.0m, 파손 0.56㎡ ∘ 받침장치 무수축 몰탈균열 0.1m, Plate 부식 6.0㎡, 고무재들뜸(미세) 18EA ∘ 하부구조 균열(0.2mm이하) 63.2m, 균열(0.3mm이상) 8.2m, 백태 0.05㎡, 누수오염 18.4㎡ ∘ 기타 부대시설 도로표지병 탈락 4EA
		개략공사비 82,728
성수대교 북단 지하차도	B (0.198)	소계 636	∘ 상부슬래브 균열(0.2mm이하) 155.2m, 균열(0.3mm이상) 14.3m, 균열군 54.8㎡, 박리 0.01㎡, 백태 0.48㎡, 파손 0.02㎡ ∘ 벽체 타일균열 93EA, 타일들뜸 3EA, 타일파손 15EA ∘ 연석 균열(0.2mm이하) 16.1m, 균열(0.3mm이상) 3.9m, 파손 0.76㎡ ∘ 옹벽구간 균열(0.2mm이하) 5.7m, 실링재 탈락 0.06㎡, 보강토블럭 균열 1.2m ∘ 포장부 아스콘 균열 67.0m, 균열군 30.6㎡, 마모 300.0㎡ ∘ 기타 부대시설 조명불량 4EA
		개략공사비 636

□ 향후계획

○ 2015년 우선 보수대상 선정(1순위) 예산반영 추진

- 송정교(1,426천원), 천호대교북단지하차도(81,513천원)

성수대교북단지하차도(96천원)

- 그 외 대상 : 일상유지보수업체에 작업지시

첨부  1. 참여기술자 현황 1부.

2. 정밀안전점검 결과표 1부.   끝.