함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수의계약 결격업체 결정

1. 행정지원과-22306(2014.11.17.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 발주 시행한 『강서수도사업소(민원센터)건축물 정밀안전진단 용역』 완수가 지연되어 아래와 같이 계약 상대자인 ㈜통일건설기술원을 수의계약 결격업체로 결정하고자 합니다.

가. 계약 및 완수사항

- 계 약 명 : 강서수도사업소(민원센터)건축물 정밀안전진단 용역

- 계약업체 : ㈜통일건설기술원 대표 김태규

- 계약금액 : 금45,680,090원

- 계약기간 : 2014.07.14. ~ 2014.09.11.

- 완 수 일 : 2014.11.14.

- 지 연 일 : 64일

나. 수의계약 결격 업체 결정

- 제한기간 : 2014.11.17. ~ 2015.05.16.(6개월)

- 결격사유 : 지연배상금 10일 이상 부과

- 제한근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부예규 제74호)                            제5장 수의계약 운영요령(수의계약 결격사유)

- 제한방법 : 서울특별시 각 기관에 해당 결격 업체에 대한 사유 및

제한기간 명시하여 공문 발송.  끝.

주무관	김미애		★행정관리팀장	김경식		행정지원과장	代김경식		강서수도사업소장	11/17 이상래
협조자
시행	행정지원과-22417	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울 양천구 신정6동 319-15	/
전화	02-3146-3843	/전송	02-3146-3879	/		/	부분공개(5)